[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	산림축산과	②담당자 (연락처)	과 장 김종현 녹지6급 이명선 (061-470-2424)
③정책사업명	생태숲 조성사업
④선정기준	5억이상 사업	⑤사업기간	2012∼2014
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 지구온난화 및 산림재해 등 자연환경적․인위적 요인에 의한 훼손과 멸실되어 가는 식물자원의 보존 필요성 ○ 기후변화에 대응한 산림식물자원의 체계적인 보전․증식 □ 추진배경 ○추진기간 : 2012 ~ 2014(3개년), 2009년 산림청 공모사업 ○위 치 : 미암면 미암리 산 48-1번지 일원, 60ha ○사업내용 - 웰컴 기(氣)찬숲 지구 : 기찬센터, 만남의 광장, 주차장 등 - 생태체험 기(氣)찬숲 지구 : 식물원, 숲속교실, 관찰로 등 - 자연탐방 기(氣)찬숲 지구 : 탐방로 및 전망대, 야생동식물 서식 공간 조성 ○사 업 비 : 3,128백만원(광특 50%, 군비 50%) (2012년 1,606백만원, 2013년 1,198백만원, 2014년 324백만원)

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기준 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재

[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

담당부서

작성자

산림축산과/산림보호팀

이명선/470-2424/ims6811@korea.kr

정 책 명

생태숲 조성사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 지구온난화 및 산림재해 등 자연환경적․인위적 요인에

의한 훼손과 멸실되어 가는 식물자원의 보존 필요성

- 기후변화에 대응한 산림식물자원의 체계적인 보전․증식

○ 추진기간 : 2012 ∼ 2014년(3개년)

○ 총사업비 : 3,128백만원(광특 50%, 군비 50%)

(2012년 1,606백만원, 2013년 1,198백만원, 2014년 324백만원)

○ 사업내용

- 웰컴 기(氣)찬숲 지구 : 기찬센터, 만남의 광장, 주차장 등

- 생태체험 기(氣)찬숲 지구 : 식물원, 숲속교실, 관찰로 등

- 자연탐방 기(氣)찬숲 지구 : 탐방로 및 전망대, 야생동식물서식공간 조성

○ 추진경과

- ‘12. 5. ~ 8. : 기본설계 및 식생조사 용역실행

- ‘12. 9 ~ 12. : 실시설계 및 소규모환경영향평가, 문화재

지표조사 용역실행

- ‘12. 11. ~ ‘13. 4. : 행정절차 이행(공공디자인 심의,

재해영향성, 소규모환경영향평가, 계약심사)

- ‘13. 4. 29 : 생태숲 조성사업 조성계획 승인(도)

- ‘13. 5. 27 : 산지전용신고 및 소하천 공사시행 허가 완료

- ‘13. 6. 17 : 사업발주

- ‘13. 8. 2 : 주민설명회 개최

- ‘13. 8. 6 ~ 현재 : 착수후 사업추진중

․토목․건축공사 : 기찬센터, 생태주차장, 기찬가든, 생태 탐방로 등

․전기공사, 통신공사

․입목폐기물 처리

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 녹지 7급(직급) 강준호(성명)

- 최종 결재자 : 행정 5급(직급) 신현대(성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
주무관	강준호	녹지7급	2012 ～ 2013	생태숲
주무관	이명선	녹지6급	2014. 1.～ 현재	생태숲
팀장	서장옥	녹지6급	2012 ～ 2013	생태숲
팀장	이명선	녹지6급	2014. 1.～ 현재	생태숲
실과소장	신현대	행정5급	2012 ～2013.06	생태숲
	김종현	행정5급	2013.07 ～ 현재	생태숲

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자