정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

수도사업소 상수도팀

②담당자

(연락처)

소  장 이선규

주무관 문기팽

(6721)

③정책사업명

농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구)

④선정기준

5억원 이상 공사 또는 사업

3천만원 이상 용역사업

⑤사업기간

2014 ~ 2017

⑥주요내용

○ 추진배경 : 영암군 수도정비기본계획(2012. 5)

○ 사업개요

- 위    치 : 영암군 금정면 연보리 일원

- 사 업 량 : 용역  기본 및 실시설계, 측량조사, 지질조사

공사  배수지 1,000㎥, 송수관로 L=7.5km,(D300)

배수관로 L=21.8km,(D300～50)가압장 1식 등

- 사 업 비 : 9,600백만원(국비 6,720. 도비 864. 군비 2,016)

구 분	합 계		2014년 (용역)		2015년 (공사)		2016년 (공사)		2017년 (공사)			비고
합 계	9,600		840		2,700		4,000			2,060
국 비	6,720		588		1,890		2,800			1,442
도 비	864		76		243		360			185
군 비	2,016		176		567		840			433

○ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 작성 및 계약심사  : ‘14.  1 ～  3월

- 적격심사 및 업체선정               : ‘14.  4 ～  5월

- 용역수행 및 설계심의(전라남도)      : ‘14.  5 ～ ’15. 4월

- 계약의뢰 및 공사착공               : ‘15.  5 ～  6월

- 공사시행 및 완료                   : ‘15.  6 ～ ’17. 12월

○ 기대효과

- 상수도 공급이 불가한 영암, 덕진, 금정, 신북 고지대 일원의

1,010세대(계획인구 3,049명)에 안정적인 지방상수도 공급으로

공중 보건위생 및 삶의 질 향상