정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대불산단 복합문화센터 건립사업
② 추진배경	○ 산단 근로자와 주민들에게 다양한 문화 및 복지서비스를 제공하여 주민 삶의 질 향상을 위한 문화복합공간 조성의 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 5. ~‘22. 11.(3년간) ○ 위 치 : 삼호읍 대불주거9로 27(대불체육공원 내) ○ 사 업 량 : 지상 2층 1동, 지상 1층 별동(1,535㎡) - 작업복 공동세탁소, 역량강화실, 산업안전체험관, 작은영화관 등 ○ 사 업 비 : 5,475백만원(국비 2,91053%, 도비 60011%, 군비 1,96536%)
④ 사업부서	일자리경제과		⑤ 담 당 자	과 장 임채을 행정8급 박이정
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 변경시행(설계변경2차, 건축도급액 증가분 집행품의)		‘22. 11.	임채을 과 장 김정경 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 설계변경(2차) 검토보고		‘22. 11.	소상원 부군수 임채을 과 장 천민성 과 장 고 율 팀 장 박희천 팀 장 김정경 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 전기사용 전 검사 신청		‘22. 10.	임채을 과 장 김정경 팀 장 박이정 주무관
○ 건설폐기물 처리 변경계획 등 신고(대불산단 복합문화센터 건리사업)		‘22. 10.	임채을 과 장 김정경 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 변경시행(집행품의)		‘22. 10.	소상원 부군수 임채을 과 장 문진규 과 장 천재철 과 장 박종조 팀 장 박이규 팀 장 이태연 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 설계변경 검토보고		‘22. 10.	소상원 부군수 임채을 과 장 문진규 과 장 박종조 팀 장 윤철민 팀 장 이태연 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 도시가스공급계약에 따른 대금지급		‘22. 9.	임채을 과 장 이태연 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 전기시설부담금 납부		‘22. 8.	임채을 과 장 이태연 팀 장 박이정 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 B.F. 본인증 용역 시행		‘22. 5.	임채을 과 장 박종조 팀 장 박이규 팀 장 박영하 팀 장 김미림 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 급수공사 신청		‘22. 4.	임채을 과 장 박영하 팀 장 김미림 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 감리용역 계약의뢰		‘22. 1.	박영하 팀 장 김미림 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건축협의		‘22. 1.	임채을 과 장 박영하 팀 장 김미림 주무관
○ 동절기 공사중지 요청		‘21. 12.	임채을 과 장 박영하 팀 장 최상철 주무관 이석준 주무관 임근일 주무관 김경정 주무관 김미림 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 착수		‘21. 12.	임채을 과 장 박영하 팀 장 양소연 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립사업 공사시행 계획(안)		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 임채을 과 장 천재철 과 장 김광호 과 장 박종조 팀 장 박이규 팀 장 박종국 팀 장 양소연 주무관
○ 대불산단 복합문화센터 건립공사 계약심사 요청		‘21. 12.	임채을 과 장 박영하 팀 장 양소연 주무관
○ 대불종합공원조성계획 변경 용역 추진		‘21. 10.	임채을 과 장 박영하 팀 장 양소연 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(B.F.) 예비인증 신청		‘21. 9.	임채을 과 장 박영하 팀 장 양소연 주무관
○ 건축설계 용역 추진		‘21. 5.	임채을 과 장 박영하 팀 장 양소연 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 건축기획 용역 추진		‘20. 9.	임채을 과 장 박영하 팀 장 박정훈 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립에 관한 연구용역
② 추진배경	○ 관내 필수노동자 지원체계 수립을 위한 업종별 실태파악 및 지원정책 발굴
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. 4. ~‘22. 8. ○ 사업범위 : 영암군 전역 ○ 사업내용 : 필수노동자 근로실태 조사 및 지원정책 도출 ○ 사 업 비 : 35백만원(군비 35100%)
④ 사업부서	일자리경제과		⑤ 담 당 자	과 장 임채을 행정7급 정혜정
⑥ 선정기준	3천만원 이상 용역		⑦ 사업기간	2022. 4. ~ 8.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암군 필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립에 관한 연구용역 최종보고회 실시		‘22. 8.	임채을 과 장 박한글 팀 장 정혜정 주무관
○ 영암군 필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립에 관한 연구용역 중간보고회 실시		‘22. 7.	임채을 과 장 김은화 팀 장 정혜정 주무관
○ 영암군 필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립에 관한 연구용역 업체 선정 및 착수		‘22. 4.	임채을 과 장 김은화 팀 장 정혜정 주무관
○ 영암군 필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립에 관한 연구용역 계약 의뢰		‘22. 2.	임채을 과 장 김은화 팀 장 정혜정 주무관
○ 영암군 필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립에 관한 연구용역 계획 수립		‘22. 2.	소상원 부군수 임채을 과 장 김은화 팀 장 정혜정 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 소상공인 긴급지원 대책비 지원
② 추진배경	○ 장기간 지속된 코로나19 영업정지 및 운영시간 제한으로 인한 소상공인들의 경제적 부담에 대해 지원
③ 사업개요	○ 지원대상 : 관내에서 사업장을 운영중인 소상공인 ○ 지원내용 : 사업장 1개소당 현금 1백만원 지원 ○ 총사업비 : 2,400백만원(군비 2,400100%)
④ 사업부서	일자리경제과		⑤ 담 당 자	과 장 임채을 행정8급 정관주
⑥ 선정기준	주민복지증진		⑦ 사업기간	2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암군 소상공인 긴급지원 대책비 3차 지원		‘22. 4.	전동평 군 수 소상원 부군수 임채을 과 장 박종국 팀 장 강윤숙 주무관
○ 영암군 소상공인 긴급지원 대책비 2차 지원		‘21. 10	전동평 군 수 박종필 부군수 임채을 과 장 박종국 팀 장 강윤숙 주무관
○ 영암군 소상공인 긴급지원 대책비 1차 지원		‘21. 1.	전동평 군 수 박종필 부군수 임채을 과 장 박종국 팀 장 강윤숙 주무관
○ 영암군 소상공인 지원에 관한 조례 개정		‘20. 7.	전동평 군 수 손점식 부군수 임문석 과 장 전덕삼 팀 장 안재근 주무관 <관련자> 김기천 의원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암읍 5일시장 주차환경 개선사업
② 추진배경	○ 영암 5일시장 주차장 부족으로 접근성이 떨어지고, 차량의 주변 도로 불법주정차 등으로 시장환경이 열악하여 주차장 확보 시급
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. ~‘22.(3년간) ○ 위 치 : 영암읍 동무리 17-3 ○ 사업내용 : 주차장 조성 200면(5,600㎡) ○ 사 업 비 : 1,750백만원(국비 9,60055%, 군비 7,90045%)
④ 사업부서	일자리경제과		⑤ 담 당 자	과 장 임채을 행정7급 장양숙
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암시장 주차환경개선사업 공사 계약의뢰		‘22. 11.	임채을 과 장 오유신 팀 장 장양숙 주무관
○ 영암시장 주차환경개선사업 실시설계 용역		‘21. 12.	임채을 과 장 박종국 팀 장 전태성 주무관
○ 영암시장 주차환경개선사업 계약심사 및 계약 추진		‘21. 8.	임채을 과 장 박종국 팀 장 전태성 주무관
○ 영암시장 주차환경개선사업 편입용지 감정평가 및 보상실시		‘21. 4.	임채을 과 장 박종국 팀 장 전태성 주무관
○ 영암시장 주차환경개선사업 편입용지 보상계획 열람공고		‘21. 3.	임채을 과 장 박종국 팀 장 전태성 주무관
○ 영암5일시장 주차환경개선사업 추진계획		‘20. 5.	전동평 군 수 손점식 부군수 임문석 과 장 전덕삼 팀 장 안재근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암읍 도시가스 공급 사업
② 추진배경	○ 대불국가산업단지가 위치한 삼호읍 일부만 도시가스 공급으로동·서간 지역균형발전 걸림돌 작용 및 소외감 유발 ○ 도내 군청 소재지 중 유일한 도시가스 미공급지역인 영암읍과 인근 면 소재지(군서·학산)와 농공단지 공급으로 군민 숙원사업 해결
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. ~‘23.(4년간) ○ 위 치 : 삼호읍(세한대학교) ~ 영암읍, 군서면, 학산면 일원 ○ 사업내용 : 41.03km(주배관 25.16km, 공급관 15.87km, 정압기 3개소) ○ 시 행 사 : 목포도시가스(주) ○ 사 업 비 : 15,700백만원(도·군비 126,00080%, 목포도시가스 31,00020%)
④ 사업부서	일자리경제과		⑤ 담 당 자	과 장 임채을 공업9급 전종훈
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 삼호읍 용앙리 도시가스 공급사업 추진계획		‘22. 11.	우승희 군 수 소상원 부군수 임채을 과 장 손병희 팀 장 전종훈 주무관
○ 영암 도시가스 공급사업 추진계획(영암,군서,학산통합)		‘22. 2.	전동평 군 수 소상원 부군수 임채을 과 장 박종국 팀 장 황안솔 주무관
○ 군서면・학산면 도시가스 공급사업 추진계획		‘21. 7.	전동평 군 수 박종필 부군수 임채을 과 장 박종국 팀 장 황안솔 주무관
○ 영암읍 도시가스 공급사업 계획		‘20. 9.	전동평 군 수 박종필 부군수 임채을 과 장 박연희 팀 장 양성대 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신재생에너지 융복합지원사업
② 추진배경	○ 미세먼지 저감과 깨끗하고 지속가능한 에너지로 전환 ○ 신재생에너지 보급 확대로 군민 재정부담 경감
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. ~‘23.(4년간) ○ 사업내용 : 1,274가구(태양광 1,073개소, 태양열 201개소) ○ 사 업 비 : 11,800백만원(국비 61,00052%, 도비 8,0007%, 군비 35,00030%, 자부담 14,00012%)
④ 사업부서	일자리경제과		⑤ 담 당 자	과 장 임채을 공업7급 이우석
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ ‘23년 신재생에너지 융복합지원사업 추진계획		‘22. 11.	우승희 군 수 소상원 부군수 임채을 과 장 손병희 팀 장 이우석 주무관
○ ‘23년 신재생에너지 융복합지원사업 추진계획		‘22. 3.	전동평 군 수 소상원 부군수 임채을 과 장 박종국 팀 장 이석준 주무관
○ ‘21년 신재생에너지 융복합지원사업 추진계획		‘20. 3.	전동평 군 수 손점식 부군수 임문석 과 장 전덕삼 팀 장 박근영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암 숲속 웰니스 체험시설 설치
② 추진배경	○ 국민여가캠핑장과 연계한 힐링·명상·어드벤처 체험시설 조성으로 수려한 자연환경을 활용하여 가족단위 이용률 제고
③ 사업개요	○ 위 치 : 영암읍 교동리 113번지 일원 ○ 사업규모 : 첼린지체험장(성인·영유아코스), 부대시설(매표소, 관리사무소 등) ○ 총사업비 : 4,905백만원(도비 2,25046%, 군비 2,65554%)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담 당 자	과 장 신환종 시설7급 김태균
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 산림레포츠 타당성조사 완료		‘22. 8.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 영암 군관리계획 결정(변경) 고시(청소년 수련시설)		‘22. 5.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 영암 숲속 웰니스 체험시설 설치기본 및 실시설계용역 시행		‘21. 2	박종필 부군수 문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 영암 숲속 웰니스 체험시설 설치군관리계획 결정(변경) 용역 시행		‘21. 2.	박종필 부군수 문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 영암 숲속 웰니스 체험시설 설치재해영향성 검토용역 시행		‘21. 2.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 지방이양사업 확정		‘20. 11.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 공유재산관리계획 반영		‘20. 9.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 지방재정 투자심사		‘20. 6.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 기본계획 수립		‘20. 5.	임채을 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	월출산 스테이션F 조성
② 추진배경	○ 영암 관광 100만명 시대를 앞당기는 체험형 관광시설 확충을 통한 새로운 관광아이템 개발 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 영암읍 개신리 일원 ○ 사업규모 : 체험형 거점관광지 4개소, 운송수단 1식 ○ 총사업비 : 19,000백만원(도비 9,50050%, 군비 9,50050%)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담 당 자	과 장 신환종 시설7급 김태균
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 월출산 스테이션F 조성사업 소규모환경영향평가, 사전 재해 영향평가용역 시행		‘22. 2.	소상원 부군수 양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 월출산 스테이션F 조성사업 군계획시설 결정 및 실시 설계용역 시행		‘21. 4.	전동평 군 수 박종필 부군수 문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 계약심의 완료 ※ 2021년 제2차 영암군 계약심의위원회 결과 알림 (원안가결)		‘21. 4.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 영암 군계획시설 결정 및 실시설계용역 계약심사 완료		‘21. 3.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 지방이양사업 확정		‘20. 11.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 지방재정투자심사		‘20. 10.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 기본계획 수립		‘20. 5.	임채을 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암 트로트 아카데미 조성
② 추진배경	○ 트로트를 기반으로 하는 문화콘텐츠를 확보하여 지속 가능한 성장을 위한 거점 구축
③ 사업개요	○ 위 치 : 영암읍 영암읍 419-3번지일원 ○ 사업규모 : 아카데미건축 2,446㎡, 교육프로그램운영 등 ○ 총사업비 : 11,000백만원(도비 5,00045%, 군비 6,00055%)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담 당 자	과 장 신환종 시설7급 김태균
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암 트로트 아카데미 건축 설계공모안 확정		‘22. 11.	우승희 군 수 소상원 부군수 신환종 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 영암 트로트 아카데미 기본 및 실시설계용역 계약심사 완료		‘22. 5.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 영암 트로트 아카데미 세부 운영계획 수립용역 시행		‘22. 5.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 영암군 건축위원회 공공건축 전문위원회 심의 완료		‘22. 5.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료		‘22. 2.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 지방재정투자심사		‘21. 11.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관
○ 타당성조사용역 완료		‘21. 9.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	상대포 역사공원 경관조명 설치
② 추진배경	○ 군서면의 다양한 생태문화 자원을 연결하는 관광벨트를 조성하고 야간관광산업의 활성화 도모
③ 사업개요	○ 위 치 : 군서면 상대포역사공원 일원 ○ 사업규모 : 경관조명, 포토존, 편의시설, 물놀이시설 ○ 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,50050%, 군비 1,50050%)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담 당 자	과 장 신환종 시설8급 김명진
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 시행		‘22. 1.	소상원 부군수 양은숙 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약심사		‘22. 1.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 지방이양사업 확정		‘21. 12.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	기찬랜드 빛찬광장 조성
② 추진배경	○ 기찬랜드를 찾는 관광객들에게 안전한 보행환경 및 새로운 힐링공간을 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 영암읍 회문리 기찬랜드 일원 ○ 사업규모 : 차없는거리, 조경수 식재, 야외무대 및 관람석정비 ○ 총사업비 : 1,800백만원(도비 90050%, 군비 90050%)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담 당 자	과 장 신환종 시설7급 김태균
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 완료		‘22. 11.	신환종 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 시행		‘22. 2.	소상원 부군수 양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약심사		‘22. 1.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 김태균 주무관
○ 지방이양사업 확정		‘21. 12.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성기동 노후관광지 재생사업
② 추진배경	○ 관광지 지정 후 35년 이상 경과되어 노후된 성기동 관광지를 수요자 중심의 관광지로 조성하여 관광객 편의 증진
③ 사업개요	○ 위 치 : 군서면 성기동 관광지 일원 ○ 사업규모 : 구림한옥마을 개보수, 경관조명, 배수로, 편의시설 ○ 총사업비 : 1,600백만원(도비 80050%, 군비 80050%)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담 당 자	과 장 신환종 시설8급 김명진
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 노후관광지 재생사업 (건축 등) 시행		‘22. 5.	전동평 군 수 소상원 부군수 양은숙 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 성기동 노후관광지 재생사업 시행(토목)		‘22. 4.	소상원 부군수 양은숙 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 성기동 노후관광지 재생사업 계약심사		‘22. 4. ~ 5.	양은숙 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 성기동 노후관광지 재생사업 스토리텔링 개발용역 시행		‘21. 10.	문진규 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 성기동 노후관광지 재생사업 실시설계용역 시행		‘21. 6.	박종필 부군수 문진규 과 장 류미아 팀 장 최은혁 주무관
○ 노후관광지 재생사업 공모확정		‘21. 6.	문진규 과 장 류미아 팀 장 김상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼호 실내수영장 건립공사
② 추진배경	○ 생활체육 기반시설이 상대적으로 취약한 지역에 다양한 체육시설을 설치·운영함으로써 지역주민의 여가문화 증진
③ 사업개요	○ 위 치 : 삼호읍 용앙리 259-1번지 일원 ○ 내 용 : 연면적 5,077.52㎡ / 지하1층, 지상2층 - 수영장(25m 7레인), 다목적체육실, 체력단련실 등 ○ 사 업 비 : 19,500백만원(균특 5,85030%, 군비 13,65070%)
④ 사업부서	스포츠산업과		⑤ 담 당 자	과 장 손석채 시설7급 오영희
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 삼호 실내수영장 건립공사 설계변경 추진(공정률 53%)		‘22. 11.	우승희 군 수 소상원 부군수 손석채 과 장 류동식 팀 장 오영희 주무관
○ 삼호 실내수영장 건립공사 착공		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 영암군 계약심의위원회 심의완료(건설사업관리용역)		‘21. 9.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 지방재정투자심사(재심사) 완료		‘21. 5.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 이영학 팀 장 유동하 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 완료		‘20. 6.	전동평 군 수 손점식 부군수 이재오 과 장 이영학 팀 장 공유송 주무관
○ 2019년 체육진흥시설 지원사업 선정		‘18. 10.	전동평 군 수 황인섭 부군수 임문석 과 장 최진석 팀 장 김소연 주무관
○ 기본계획 및 타당성조사용역 완료		‘18. 6.	전동평 군 수 황인섭 부군수 임문석 과 장 최진석 팀 장 김소연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼호 어울림 문화체육센터 건립공사
② 추진배경	○ 민속씨름단 훈련장을 신축하여 쾌적한 훈련장소를 제공함으로써 선수들의 경기력 향상을 도모하고, 아울러 지역주민을 위한 생활 문화센터를 함께 건립하여 정주여건을 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 삼호읍 용당리 1924-1번지 ○ 내 용 : 연면적 2,672.03㎡ / 지하1층, 지상3층 - 씨름훈련장, 체력단련실, 마루공간, 어린이놀이체육실 등 ○ 사 업 비 : 11,000백만원(균특 3,76034%, 군비 7,24066%)
④ 사업부서	스포츠산업과		⑤ 담 당 자	과 장 손석채 시설7급 오영희
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 중지		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 손석채 과 장 류동식 팀 장 오영희 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 착수		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 기존 건축물(서부출장소) 철거공사 시행		‘21. 9.	박종필 부군수 천민성 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 건축기획 사전검토 및 공공건축 심의		‘21. 3.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 이영학 팀 장 유동하 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘20. 10.	전동평 군 수 박종필 부군수 이재오 과 장 이영학 팀 장 유동하 주무관
○ 2021년 체육진흥시설 지원사업 선정		‘20. 9.	전동평 군 수 박종필 부군수 이재오 과 장 이영학 팀 장 유동하 주무관
○ 기본계획 및 타당성조사용역 완료		‘20. 4.	전동평 군 수 손점식 부군수 이재오 과 장 이영학 팀 장 공유송 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 반다비 체육센터 건립
② 추진배경	○ 장애인 스포츠에 대한 국민적 관심을 장애인 생활체육 발전으로 연결하고, 시설건립을 통한 장애인 생활체육 커뮤니티 센터 기능 수행 기대
③ 사업개요	○ 위 치 : 영암읍 역리 121번지 일원 ○ 내 용 : 연면적 1,722.6㎡ / 지상2층 - 다목적체육관, 사무실, 체력단련실, 다목적실, 소회의실 등 ○ 사 업 비 : 6,000백만원(기금 3,00050% , 군비 3,00050%)
④ 사업부서	스포츠산업과		⑤ 담 당 자	과 장 손석채 시설7급 오영희
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 건축 설계공모 심사위원 구성		‘22. 11.	우승희 군 수 소상원 부군수 손석채 과 장 류동식 팀 장 오영희 주무관
○ 공공건축심의위원회 기획심의		‘22. 10.	방정채 과 장 조삼열 팀 장 오영희 주무관
○ 건축기획 용역 및 사전검토 시행		‘22. 5.	방정채 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 영암군 공유재산 관리계획 반영		‘22. 2.	전동평 군 수 소상원 부군수 방정채 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 2022년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 공모 선정		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관
○ 타당성 조사 및 기본계획 용역 시행		‘21. 10.	천민성 과 장 전학준 팀 장 조정민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 민속씨름단 운영
② 추진배경	○ 영암군 민속씨름단의 운영을 통한 다양한 스포츠 마케팅 활동으로 지역 브랜드 제고 및 농특산물 홍보
③ 사업개요	○ 구 성 : 16명(감독1, 코치1, 트레이너1, 선수13) ○ 주요사업 : 민속씨름대회 참가, 농특산물 홍보 등 ○ 사 업 비 : 2,158백만원(군비 2,158100%)
④ 사업부서	스포츠산업과		⑤ 담 당 자	과 장 손석채 행정7급 김도완
⑥ 선정기준	5억이상 사업		⑦ 사업기간	2017. ~ 계속
<그간 주요 추진내용>
○ 영암군민속씨름단 운영 공론화 용역 시행		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 손석채 과 장 조삼열 팀 장 김도완 주무관
○ 영암군 민속씨름단 운영위원회 개최		‘21. 10.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 전학준 팀 장 황선영 주무관
○ 영암군 민속씨름단 운영위원회 개최		‘21. 1.	전동평 군 수 박종필 부군수 천민성 과 장 이영학 팀 장 황선영 주무관
○ 영암군 민속씨름단 운영위원회 개최		‘20. 1.	전동평 군 수 손점식 부군수 이재오 과 장 이영학 팀 장 전태성 주무관
○ 영암군청씨름단 설치 및 운영 조례 일부개정		‘19. 10.	전동평 군 수 손점식 부군수 이재오 과 장 최진석 팀 장 전태성 주무관
○ 영암군 민속씨름단 운영위원회 개최		‘19. 1.	전동평 군 수 손점식 부군수 이재오 과 장 최진석 팀 장 옥충근 주무관
○ 영암군 민속씨름단 운영 효과분석 용역		‘18. 8.	전동평 군 수 황인섭 부군수 임문석 과 장 최진석 팀 장 옥충근 주무관
○ 영암군 민속씨름단 운영위원회 개최		‘18. 1.	전동평 군 수 황인섭 부군수 임문석 과 장 최진석 팀 장 옥충근 주무관
○ 영암군 민속씨름단 창단 및 운영		‘17. 1.	전동평 군 수 황인섭 부군수 임문석 과 장 최진석 팀 장 옥충근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지적재조사사업
② 추진배경	○ 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부의 등록사항을 바로 잡고 종이에 구현된 지적을 디지털 지적으로 전환함으로써 국토를 효율적으로 관리함과 아울러 군민의 재산권 보호
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘12. ~‘30.(19년간) ○ 사 업 량 : 78,892필지(연도별 사업추진) ○ 사업내용 : 지적공부 경계와 실제 경계 불일치 지역 지적공부 신규 작성 ○ 사 업 비 : 14,279백만원(국비 14,279100%) -‘22년 사업비 2,638백만원
④ 사업부서	민원소통과		⑤ 담당자		과 장 최공수 시설7급 박현진
⑥ 선정기준	5억이상 사업		⑦ 사업기간		2012. ~ 2030.
<그간 주요 추진내용>
○ 2022년 지적재조사 시범사업 측량·조사 등의 위·수탁 계약 체결		‘22. 11.		소상원 부군수 최공수 과 장 정일경 팀 장 박현진 주무관
○ 2022년 지적재조사 시범사업 측량·조사 등의 책임수행기관 위·수탁 계약 및 고시 계획		‘22. 11.		우승희 군 수 소상원 부군수 최공수 과 장 정일경 팀 장 박현진 주무관
○ 2023년 지적재조사사업 실시계획		‘22. 10.		우승희 군 수 소상원 부군수 신환종 과 장 정일경 팀 장 박현진 주무관
○ 2022년 지적재조사 시범사업지구 실시계획		‘22. 9.		우승희 군 수 소상원 부군수 신환종 과 장 정일경 팀 장 박현진 주무관
○ 2022년 지적재조사 측량·조사 등의 위·수탁 계약 체결		‘22. 2.		소상원 부군수 장창은 과 장 정일경 팀 장 김영석 주무관
○ 2022년 지적재조사사업 측량·조사 등의 책임수행기관 위·수탁 계약 및 고시 계획		‘22. 2.		전동평 군 수 소상원 부군수 장창은 과 장 정일경 팀 장 김영석 주무관
○ 2022년 지적재조사사업 실시계획		‘21. 9.		전동평 군 수 박종필 부군수 장창은 과 장 정일경 팀 장 김영석 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 지하시설물 전산화사업(2단계)
② 추진배경	○ 영암군 지하시설물 1단계 사업이 총 5차년(‘13.~‘17.)에 걸쳐 완료됨에 따라 관내 미구축 지역을 확대 구축함으로써 지하 시설물 DB를 현행화하고, 각종 재난 및 안전사고를 사전예방 하여 주민 생활 안전 도모
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. ~‘24.(3년간) ○ 사업위치 : 삼호읍 일원 ○ 사 업 량 : 400.8㎞(도로 124.4㎞, 상수도 108.0㎞, 하수도 168.4㎞) ○ 사업내용 : 도로 및 상·하수도 지하시설물 D/B통합구축○ 총사업비 : 2,820백만원(군비 2,820100%)
④ 사업부서	종합민원과		⑤ 담당자	과 장 최공수 시설7급 임유미
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암군 지하시설물 전산화사업(2단계) 공공측량 성과심사 접수		‘22. 11.	최공수 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관
○ 영암군 지하시설물 전산화사업(2단계) 사업 시행		‘22. 4.	장창은 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관
○ 영암군 지하시설물 전산화사업(2단계) 제안서평가위원회 개최		‘22. 3.	전동평 군 수 소상원 부군수 장창은 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관
○ 국가공간정보사업 중복투자 여부 및 보안성 검토 완료		‘22. 3.	장창은 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관
○ 계약심의위원회 심의 완료		‘22. 2.	전동평 군 수 소상원 부군수 장창은 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관
○ 정보화사업 사전검토 완료		‘22. 2.	전동평 군 수 소상원 부군수 장창은 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관
○ 사업계획 사전검토 및 지방재정투자심사 완료		‘21. 11.	전동평 군 수 박종필 부군수 장창은 과 장 이우형 팀 장 임유미 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노인목욕비 및 이·미용비 지원
② 추진배경	○ 어르신들의 개인위생 청결 기회 제공으로 각종 질병 예방과 건강증진 지원 ○ 초고령화 사회 전환으로 인한 노인복지 수요 증가에 부응
③ 사업개요	○ 지원대상 : 관내 거주 65세 이상 노인 ○ 지원내용 : 5,000원권 기준, 예산범위내에서 지급(‘22년 연36매 지급) ○ 이용업소 : 관내 협약업소 122개소 - 목욕 12개소(사설 9, 공영 3), 이·미용 110개소 ○ 총사업비 : 2,609백만원(군비 2,609100%)
④ 사업부서	주민복지과		⑤ 담 당 자	과 장 유미경 복지9급 권원하
⑥ 선정기준	복지증진		⑦ 사업기간	2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 일부 개정		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 양은숙 과 장 이동철 팀 장 이현지 주무관
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원사업 확대지원		‘21. 1.	전동평 군 수 박종필 부군수 양은숙 과 장 이동철 팀 장 최정민 주무관
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원사업 확대지원		‘20. 1.	전동평 군 수 손점식 부군수 양은숙 과 장 이동철 팀 장 김민아 주무관
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 일부 개정		‘19. 12.	전동평 군 수 손점식 부군수 조갑수 실 장 박혜영 팀 장 김민아 주무관
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 일부 개정		‘18. 12.	전동평 군 수 황인섭 부군수 김재봉 실 장 신환종 팀 장 김현아 주무관
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 일부 개정		‘16. 12.	전동평 군 수 김양수 부군수 최두복 실 장 박종조 팀 장 양근화 주무관
○ 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 개정		‘15. 12.	전동평 군 수 김양수 부군수 박태홍 실 장 김영중 팀 장 최진영 주무관
○ 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료		‘15. 10.	김충화 사회보장조정과장 김은영 행정사무관 이영주 주무관
○ 영암군 노인목욕비 지원 조례 제정		‘14. 12.	전동평 군 수 고영윤 부군수 최두복 과 장 최상석 팀 장 이은하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 가족복합센터 건립
② 추진배경	다문화·돌봄 등 통합적 가족지원 및 주민편의 기능을 수행하는 생활SOC 복합화 시설을 건립하여 지역주민의 공공복리증진
③ 사업개요	○ 위 치 : 삼호읍 용앙리 259-34번지 외 2필지 ○ 규 모 : 연면적 1,877.43㎡ / 지하1층, 지상2층 - 주요시설 : 가족센터, 공동육아나눔터, 새로일하기센터, 작은도서관 등 ○ 총사업비 : 7,289백만원(국비 1,61222%, 군비 5,67778%)
④ 사업부서	가족행복과		⑤ 담당자	과 장 김명선 복지7급 김주환
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 지방재정투자심사(전라남도) 완료		‘22. 7.	천민성 과 장 전희자 팀 장 김희정 주무관
○ 공유재산관리 계획 반영		‘22. 7.	천민성 과 장 전희자 팀 장 김희정 주무관
○ 영암군 가족복합센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 유미경 과 장 전희자 팀 장 임미나 주무관
○ 영암군 건축위원회 공공건축 전문위원회 심의 완료		‘21. 6.	유미경 과 장 전희자 팀 장 임미나 주무관
○ 공유재산관리 계획 반영		‘20. 9.	유미경 과 장 전희자 팀 장 박정민 주무관
○ 2021년 생활SOC복합화사업 선정		‘20. 9.	유미경 과 장 전희자 팀 장 박정민 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘20. 7.	유미경 과 장 전희자 팀 장 박정민 주무관
○ 생활SOC 복합화사업 신청		‘20. 4.	유미경 과 장 전희자 팀 장 김민주 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2050 탄소중립 영암군 기후변화 대응계획 수립 용역
② 추진배경	○ 국가 2050 장기 저탄소 발전전략 수립에 따라 국가계획과 연계하여 지역의 탄소중립 실현을 위한 체계구축 필요 ○ 2050 탄소중립의 실현에 지자체 역할이 강조되며, 지역의 탄소중립을 체계적으로 수행하기 위한 중장기 계획 수립 필요성
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. 6. ~‘23. 4.(10개월) ○ 사업범위 : 영암군 전역 ○ 사업내용 : 영암군 온실가스 배출·흡수 현황 및 전망, 2050 탄소중립 비전, 기후변화 적응 목표 및 전략 수립 등 ○ 사 업 비 : 90백만원(군비 90100%)
④ 사업부서	환경기후과		⑤ 담 당 자	과 장 류기봉 환경9급 이건창
⑥ 선정기준	3천만원 이상 용역		⑦ 사업기간	2022. 6. ~ 2023. 4.
<그간 주요 추진내용>
○ 2050 탄소중립 영암군 기후 변화 대응계획 수립 용역 일시중지		‘22. 11.	류기봉 과 장 김미숙 팀 장 이건창 주무관
○ 2050 탄소중립 영암군 기후 변화 대응계획 수립 용역 협상체결		‘22. 6.	류기봉 과 장 이종욱 팀 장 우경아 주무관
○ 2050 탄소중립 영암군 기후 변화 대응계획 수립 용역 제안서 평가 위원회 개최 및 결과보고		‘22. 5.	류기봉 과 장 이종욱 팀 장 우경아 주무관
○ 2050 탄소중립 영암군 기후 변화대응계획 수립 용역 계약의뢰		‘22. 5.	류기봉 과 장 이종욱 팀 장 우경아 주무관
○ 2050 탄소중립 영암군 기후 변화 대응계획 수립 용역 계획		‘22. 4.	전동평 군 수 소상원 부군수 류기봉 과 장 이종욱 팀 장 우경아 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	안노천 생태하천 복원사업
② 추진배경	○ 오염하천, 생태계 훼손 하천을 대상으로 수질을 개선하고 수생태계 건강성을 회복시켜 생태하천으로 복원
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘18. ~‘23.(6년간) ○ 위 치 : 영암군 금정면 안노리 안노천 일원 ○ 사 업 량 : 생태하천 정비 L=3.3km ○ 사 업 비 : 9,000백만원(균특 4,50050%, 군비 4,50050%)
④ 사업부서	환경기후과		⑤ 담 당 자	과 장 류기봉 시설9급 민의연
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 안노천 생태하천 복원사업 2차분 시행		‘22. 4.	전동평 군 수 박종필 부군수 류기봉 과 장 김경원 팀 장 최병옥 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업 총괄분 및 1차분 시행		‘20. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 류기봉 과 장 김경원 팀 장 박정훈 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업 복원심의 요청		‘20. 10.	류기봉 과 장 김경원 팀 장 김은일 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업 소규모환경영향평가 협의 요청		‘20. 7.	류기봉 과 장 김경원 팀 장 김은일 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업 기술검토 협의요청		‘20. 2.	류기봉 과 장 김경원 팀 장 김은일 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 평가결과		‘18. 3.	황인섭 부군수 현희준 과 장 이정림 팀 장 박정훈 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업 용역 시행		‘18. 2.	전동평 군 수 황인섭 부군수 현희준 과 장 이정림 팀 장 박정훈 주무관
○ 안노천 생태하천 복원사업을 위한 기본계획(안) 사전심의 요청		‘17. 8.	현희준 과 장 이정림 팀 장 박정훈 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	기찬 자연휴양림 조성사업
② 추진배경	○ 기 조성된 생태숲과 산림욕장을 연계한 다양하고 자연친화적인 산림휴양 인프라 확충으로 주민들의 휴식․휴양․레저공간 제공 및 삶의 질 향상
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘18. 1. ~‘23. 3.(6년간) ○ 위 치 : 미암면 미암리 산 48-1 외 1필지 ○ 주요시설 : 숙박, 편익, 위생, 체험·교육, 체육시설 - 숲속의 집(10동), 방문자센터(1동), 활기찬 숲, 다목적 광장, 피크닉장, 야영장, 산책로 등 ○ 사 업 비 : 7,000백만원(균특 3,50050%, 도비 1,05015%, 군비 2,45035%)
④ 사업부서	산림휴양과		⑤ 담당자	과 장 이재오 녹지7급 오평주
⑥ 선정기준	역점사업		⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 2차분 공사 준공 - 숲속의 집 10동, 철근콘크리트 구조물		‘22. 8.	이재오 과 장 강준호 팀 장 오평주 주무관 김인혁 주무관 박성현 주무관 최상철 주무관
○ 1차분 공사 준공 - 방문자센터 1동, 오수시설 등		‘21. 5.	방정채 과 장 이종욱 팀 장 류선경 주무관 조정민 주무관 박성현 주무관 최상철 주무관
○ 전라남도 지방재정투자심사(2단계)		‘20. 6.	장창은 과 장 이명선 팀 장 강준호 주무관
○ 전라남도 공공디자인 심의		‘19. 9.	서장옥 과 장 이명선 팀 장 강준호 주무관
○ 기찬자연휴양림 지정구역 변경고시 (산림청고시 2019-13호)		‘19. 2.	서장옥 과 장 이명선 팀 장 류선경 주무관
○ 기찬자연휴양림 지정고시 (산림청고시 2017-47호)		‘17. 5.	곽경구 과 장 박종필 팀 장 이대운 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	자연재해저감 종합계획수립 및 재해지도작성 용역
② 추진배경	○ 자연재해대책법 제16조 제1항에 따라 자연재해예방 및 저감을 위하여 10년마다 수립하여야 하는 종합계획
③ 사업개요	○ 용역기간 :‘19. 12. ~‘22. 12.(4년간) ※ 행정안전부 사전검토 미협의로 용역중지 예정 ○ 대 상 : 영암군 전체(2읍 9면) ○ 과업내용 : 자연재해저감 종합계획수립 1식, 재해지도작성 1식 ○ 사 업 비 : 1,459백만원(군비 1,459100%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설7급 문기팽
⑥ 선정기준	3천만원 이상 용역		⑦ 사업기간	2019. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 행정안전부 재난영향분석과 사전검토 재협의		‘22. 7.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 행정안전부 재난영향분석과 지적사항 보완 실시		‘21. 12.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 행정안전부 재난영향분석과 사전검토 협의(1차)		‘21. 10.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 주민공청회 실시		‘21. 7.	안정욱 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 위험지구 선정 및 현장 확인		‘21. 4.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 자연재해저감 종합계획수립 및 재해지도 작성용역 (1차분) 완료 및 예비후보지 선정		‘20. 8.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 박금철 주무관
○ 자연재해저감 종합계획수립 및 재해지도 작성용역 (2차분) 착수		‘20. 5.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 임 한 주무관
○ 자연재해저감 종합계획수립 및 재해지도 작성용역 (총괄 및 1차분) 착수		‘19. 12.	최흥섭 과 장 이명돈 팀 장 오상운 주무관
○ 자연재해저감 종합계획수립 및 재해지도 작성용역 사업수행 능력평가		‘19. 9.	최흥섭 과 장 이명돈 팀 장 오상운 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	학산 하암소하천 정비사업(완료)
② 추진배경	○ 소하천의 치수 안정성 확보와 사전 재해예방을 위해 소하천 정비 중기계획에 의거 소하천 정비사업 추진 ○ 소하천 정비사업 추진으로 주민 재산 및 인명 피해 예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 3. ~‘22. 10.(3년간) ○ 위 치 : 학산면 신덕리 일원 ○ 사 업 량 : 하천정비 L=0.3㎞ ○ 사 업 비 : 710백만원(국비 30550%, 군비 30550%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설8급 김한별
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 학산 하암소하천 정비사업 (2차분) 준공		‘22. 10.	조준호 과 장 김대웅 팀 장 김명진 주무관
○ 학산 하암소하천 정비사업 (1차분) 준공		‘22. 4.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 김명진 주무관
○ 학산 하암소하천 정비사업 (2차분) 시행		‘22. 3.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 김명진 주무관
○ 편입토지 보상금 확정		‘21. 3.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관
○ 학산 하암소하천 정비사업 (총괄 및 1차분) 시행		‘20. 12.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관
○ 학산 하암소하천 정비사업 계약심사 완료		‘20. 11.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관
○ 학산 하암소하천 정비사업 실시설계용역 완료		‘20. 6.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관
○ 학산 하암소하천 정비사업 실시설계용역 착수		‘20. 3.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	덕진 향월소하천 정비사업(완료)
② 추진배경	○ 소하천의 치수 안정성 확보와 사전 재해예방을 위해 소하천 중기계획에 의거 소하천 정비사업 추진 ○ 소하천 정비사업 추진으로 주민 재산 및 인명 피해 예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 1. ~‘22. 8.(3년간) ○ 위 치 : 덕진면 장선리 일원 ○ 사 업 량 : 하천정비 L=0.6㎞ ○ 사 업 비 : 997백만원(국비 498.550%, 군비 498.550%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설8급 김경진
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 덕진 향월소하천 정비사업 (2차분) 준공		‘22. 8.	조준호 과 장 김대웅 팀 장 김경진 주무관
○ 덕진 향월소하천 정비사업 (1차분) 준공		‘21. 8.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 덕진 향월소하천 정비사업 (2차분) 착수		‘21. 6.	안정욱 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 덕진 향월소하천 정비사업 (총괄 및 1차분) 착수		‘20. 12.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 장우영 주무관
○ 덕진 향월소하천 정비사업 계약심사 완료		‘20. 11.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 장우영 주무관
○ 덕진 향월소하천 정비사업 실시설계용역 완료		‘20. 7.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 장우영 주무관
○ 덕진 향월소하천 정비사업 실시설계용역 착수		‘20. 2.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 장우영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서호 영풍소하천 정비사업
② 추진배경	○ 소하천의 치수 안정성 확보와 사전 재해예방을 위해 소하천 정비 중기계획에 의거 소하천 정비사업 추진 ○ 소하천 정비사업 추진으로 주민 재산 및 인명 피해 예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 1. ~‘23. 6.(4년간) ○ 위 치 : 서호면 엄길리 일원 ○ 사 업 량 : 하천정비 L=1.08㎞ ○ 사 업 비 : 4,617백만원(국비 2308.550%, 군비 2.08.550%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설7급 문기팽
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 편입토지 보상금 확정		‘22. 7.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘22. 3.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 사업인정(의제)사업 중토위 협의 완료		‘22. 1.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 서호 영풍소하천 정비사업 (총괄 및 1차분) 착공		‘21. 6.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 서호 영풍소하천 정비사업 전라남도 계약심사 완료		‘21. 5.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 서호 영풍소하천 정비사업 전라남도 사전설계검토 완료		‘20. 12.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 박금철 주무관
○ 서호 영풍소하천 정비사업 실시설계용역 완료		‘20. 12.	안정욱 과 장 이명돈 팀 장 박금철 주무관
○ 서호 영풍소하천 정비사업 실시설계용역 착수		‘20. 3.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 임 한 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신북 용산소하천 정비사업
② 추진배경	○ 소하천의 치수 안정성 확보와 사전 재해예방을 위해 소하천 정비 중기계획에 의거 소하천 정비사업 추진 ○ 소하천 정비사업 추진으로 주민 재산 및 인명 피해 예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 1. ~‘24. 4.(4년간) ○ 위 치 : 신북면 모산리 일원 ○ 사 업 량 : 하천정비 L=1.48㎞ ○ 사 업 비 : 2,600백만원(국비 1,30050%, 군비 1,30050%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설7급 문기팽
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 편입토지 보상협의(2차) 알림		‘22. 11.	조준호 과 장 황석태 팀 장 문기팽 주무관
○ 편입토지 보상금 확정		‘22. 7.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 신북 용산소하천 정비사업 (총괄 및 1차분) 착공		‘22. 5.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘22. 4.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 소규모 환경영향평가용역 완료		‘22. 2.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 사업 시행계획 수립 공고		‘22. 2.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 사업인정(의제)사업 중토위 협의 완료		‘22. 1.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 사업인정에 따른 주민 의견청취		‘21. 12.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 전라남도 사전설계 검토 완료		‘21. 11.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 문화재 지표조사용역 시행		‘21. 10.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 소규모 환경영향평가용역 시행		‘21. 10.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 주민설명회 개최		‘21. 8.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 문기팽 주무관
○ 신북 용산소하천 정비사업 토질조사용역 완료		‘21. 4.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 신북 용산소하천 정비사업 실시설계용역 착수		‘21. 3.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 신북 용산소하천 정비사업 토질조사용역 착수		‘21. 2.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	학산 쌍암소하천 정비사업
② 추진배경	○ 소하천의 치수 안정성 확보와 사전 재해예방을 위해 소하천 정비 중기계획에 의거 소하천 정비사업 추진 ○ 소하천 정비사업 추진으로 주민 재산 및 인명 피해 예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 1. ~‘24. 5.(4년간) ○ 위 치 : 학산면 상월리 일원 ○ 사 업 량 : 하천정비 L=0.6㎞ ○ 사 업 비 : 1,400백만원(국비 70050%, 군비 70050%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설7급 문기팽
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 학산 쌍암소하천 정비사업 (총괄 및 1차분) 착공		‘22. 6.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 편입토지 보상금 확정		‘22. 6.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘22. 4.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 농지전용(전라남도) 협의 완료		‘22. 3.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 계약심사 및 시행계획 공고		‘22. 2.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 사업인정(의제)사업 중토위 협의 완료		‘22. 1.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 사업인정에 따른 주민 의견 청취 공고		‘21. 12.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 사업인정에 따른 주민 의견 청취 공고		‘21. 12.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 특별교부세 정책사업 대상 결정		‘21. 6.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금정 남송1지구 급경사지 정비사업
② 추진배경	○ 재해 위험성이 높은 급경사지를 정비하여 이용 차량 및 지역 주민들의 안전사고 사전예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 3. ~‘22. 11.(3년간) ○ 위 치 : 금정면 남송리 산 2-1 일원 ○ 사 업 량 : 사면정비 L=290m ○ 사 업 비 : 1,700백만원(국비 85050%, 군비 85050%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설8급 김경진
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 금정 남송1지구 급경사지 사업 2차분 착공		‘22. 4.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 금정 남송1지구 급경사지 사업 1차분 준공		‘22. 4.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 금정 남송1지구 급경사지 사업 환경영향평가 용역 완료		‘21. 11.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 금정 남송1지구 급경사지 사업 1차분 착공		‘21. 6.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 남송1지구 급경사지 사업 전라남도 계약심사 완료		‘21. 5.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 남송1지구 급경사지 사업 전라남도 사전설계검토		‘21. 2.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 남송1지구 급경사지 정비사업 실시설계 및 지질조사용역 시행		‘20. 3.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금정 남송2지구 급경사지 정비사업
② 추진배경	○ 재해 위험성이 높은 급경사지를 정비하여 이용 차량 및 지역 주민들의 안전사고 사전예방
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 3. ~‘23. 3.(4년간) ○ 위 치 : 금정면 남송리 산 2-1 일원 ○ 사 업 량 : 사면정비 L=450m ○ 사 업 비 : 1,600백만원(국비 80050%, 군비 80050%)
④ 사업부서	군민안전과		⑤ 담 당 자	과 장 조준호 시설8급 김경진
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 금정 남송2지구 급경사지 사업 재개		‘22. 8.	조준호 과 장 김대웅 팀 장 김경진 주무관
○ 금정 남송2지구 급경사지 사업 일시정지		‘22. 3.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 금정 남송2지구 급경사지 사업 환경영향평가 용역 완료		‘21. 11.	손근식 과 장 김대웅 팀 장 박금철 주무관
○ 금정 남송2지구 급경사지 사업 환경영향평가 용역 시행		‘21. 7.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 남송2지구 급경사지 사업 전라남도 계약심사 완료		‘21. 5.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 남송2지구 급경사지 사업 전라남도 사전설계검토		‘21. 4.	김동식 과 장 김대웅 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 남송2지구 급경사지 정비사업 실시설계 및 지질조사용역 시행		‘20. 3.	김광호 과 장 이명돈 팀 장 구지영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	교통사고 위험도로 구조개선사업
② 추진배경	○ 선형이 불량하여 시거확보가 어려운 도로의 구조를 개선하여 교통사고 예방 ○ 노후·파손된 도로를 정비하여 안전한 교통환경 조성
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘14. ~‘24.(11년간) ○ 위 치 : 영암읍, 삼호읍, 덕진면 ○ 사 업 량 : 3개지구 6.14㎞ ○ 사업내용 - 천황사길 선형개선 L=4.50㎞ / 18,253백만원 - 삼호 백야~동역마을간 L=1.27㎞ / 2,200백만원 - 덕진 군도5호선 L=0.37㎞ / 950백만원 ○ 총사업비 : 21,403백만원(군비 21,403100%) -‘22년 800백만원
④ 사업부서	건설교통과		⑤ 담당자	과 장 최흥섭 시설7급 임민우
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2014. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 덕진 군도5호선 선형개선 - 실시설계용역 완료 - 편입토지 보상 착수		‘21. 11. ‘22. 05.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관
○ 삼호 백야~동역마을간 선형개선 - 실시설계용역 완료 - 환경영향평가 착수		‘21. 04. ‘22. 04.	문동일 과 장 최영복 팀 장 전주완 주무관
○ 천황사길 선형개선공사 - 실시설계용역 완료 - 도로노선지정(변경) 공고 - 국토교통부 지역개발사업 선정		‘14. 12. ‘16. 10. ‘21. 12.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농어촌도로 확포장공사
② 추진배경	○ 차량 및 농기계 이동 편익제공으로 주민 삶의 질 향상 ○ 농산물 수송로 확충으로 농업생산성 향상 및 농가소득증대
③ 사업개요	○ 사업기간:‘13. ~‘24.(11년간) ○ 위 치: 영암읍, 삼호읍, 덕진면, 신북면 ○ 사 업 량: 6개지구, 5.98㎞ ○ 사업내용 - 월출산 진입도로 L=0.74㎞ / 2,067백만원 - 청소년 수련원 진입로 L=1.56㎞ / 2,500백만원 - 삼호 중촌마을 L=0.97㎞ / 2,737백만원 - 삼호 원서호마을 L=0.45㎞ / 1,000백만원 - 덕진 소방항공대~동백정간 L=1.47㎞ / 3,190백만원 - 신북 유곡마을 L=0.79㎞ / 1,458백만원 ○ 총사업비: 12,952백만원(특교 7005%, 도비 4303%, 군비 11,82292%) -‘22년 3,840백만원(특교 70018%, 도비 2306%, 군비 2,91076%)
④ 사업부서	건설교통과		⑤ 담당자	과 장 최흥섭 시설7급 임민우
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2013. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 월출산 진입도로 확포장공사 - 공사 착공 - 공사 준공		‘20. 04. ‘22. 09.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관
○ 청소년 수련원 진입도로 확포장공사 - 실시설계용역 완료 - 편입토지 보상 착수		‘15. 12. ‘17. 01.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관
○ 삼호 중촌마을 진입로 확포장공사 - 실시설계용역 완료 - 총괄 및 1차분 착공		‘21. 02. ‘21. 12.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관
○ 삼호 원서호마을 농어촌도로 확포장공사 - 실시설계용역 완료 - 편입토지 보상 착수 - 공사 착공		‘21. 12. ‘22. 06. ‘22. 11.	문동일 과 장 최영복 팀 장 전주완 주무관
○ 덕진 소방항공대~동백정간 농어촌도로 확포장공사 - 총괄 및 1차분 착공 - 1차분 준공 - 2차분 준공 - 3차분 착공		‘19. 12. ‘20. 10. ‘21. 05. ‘22. 03.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관
○ 신북 유곡마을 농어촌도로 확포장공사 - 공사 착공 - 공사 준공		‘20. 03. ‘22. 10.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	재해위험 노후교량 개보수공사
② 추진배경	○ 노후및 파손으로 안전진단결과 D등급으로 판명되어 재해위험으로부터 주민의 재산과 생명을 보호
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘19. ~‘23.(5년간) ○ 위 치 : 서호면, 도포면, 학산면 ○ 사 업 량 : 교량 개수 3개소 ○ 사업내용 - 서호 화송교 개수 L=69m / 3,154백만원 - 도포 수산교 개수 L=53m / 2,294백만원 - 학산 월창교 개수 L=50m / 1,800백만원 ○ 총사업비 : 7,248백만원(특교 1,00014%, 군비 6,24886%) -‘22년 2,500백만원(특교 1,00040%, 군비 1,50060%)
④ 사업부서	건설교통과		⑤ 담당자	과 장 최흥섭 시설7급 임민우
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 서호 화송교 개수공사 - 공사 착공 - 공사 준공		‘20. 08. ‘22. 08.	문동일 과 장 최영복 팀 장 임민우 주무관
○ 도포 수산교 개수공사 - 실시설계용역 완료 - 계약심사 완료		‘20. 05. ‘22. 09.	문동일 과 장 최영복 팀 장 김한얼 주무관
○ 학산 월창교 개수공사 - 정밀안전점검 완료 - 실시설계용역 착수		‘21. 11. ‘22. 02.	문동일 과 장 최영복 팀 장 전주완 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용당지구 배수개선사업
② 추진배경	○ 상습침수 농경지를 대상으로 농작물 침수피해방지, 영농환경개선 ○ 재해를 사전에 예방하기 위해 배수펌프장, 배수로 등을 정비
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 9. ~‘25. 12.(5년간) ○ 위 치 : 삼호읍 용당리 일원 ○ 사 업 량 : 배수장 1개소, 배수문 1개소, 배수로 L=1,670m, 매립 0.88ha ○ 총사업비 : 9,634백만원(국비 9,634100%) -‘22년 1,000백만원
④ 사업부서	건설교통과		⑤ 담당자	과 장 최흥섭 시설7급 임광규
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 삼호 용당지구 배수개선사업 총사업비 협의(농식품부) 및 시행계획 승인(전라남도)		‘22. 9. ~‘22. 10.	문동일 과 장 황석태 팀 장 임광규 주무관
○ 삼호 용당지구 배수개선사업 실시설계용역 시행		‘21. 9.	문동일 과 장 황석태 팀 장 최창근 주무관
○ 신규지구 대상지 선정 (농식품부)		‘21. 4.	안정욱 과 장 황석태 팀 장 최창근 주무관
○ 기본조사 및 기본계획 수립 (농식품부)		‘21. 1.	안정욱 과 장 황석태 팀 장 최창근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	밭기반 정비사업
② 추진배경	○ 집단화된 밭을 대상으로 용수개발, 농로개설 등 생산기반 구축 ○ 밭작물의 생산성 향상과 품질개선으로 농업인의 소득증대 기여
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 12. ~‘25. 12(5년간) ○ 위 치 : 미암면, 도포면, 금정면 ○ 사 업 량 : 3개지구, 203.9ha ○ 사업내용 - 계속사업지구 □ 미암 신포,호포지구 A=43.6ha / 1,988백만원 □ 도포 조감지구 A=55.3ha / 2,288백만원 □ 금정 안노지구 A= 105ha / 3,000백만원 ○ 총사업비 : 7,276백만원(도비 6,54890%, 군비 72810%) -‘22년 1,350백만원(도비 1,21490%, 군비 13610%)
④ 사업부서	건설교통과		⑤ 담당자	과 장 최흥섭 시설7급 임광규
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 금정 안노지구 밭기반정비사업 - 기본계획 승인요청(전라남도)		‘22. 9.	문동일 과 장 황석태 팀 장 임광규 주무관
○ 도포 조감지구 밭기반정비사업 - 공사 및 감리용역 착수		‘21. 12.	문동일 과 장 황석태 팀 장 최창근 주무관
○ 미암 신포,호포지구 밭기반정비사업 - 공사 및 감리용역 착수		‘21. 12.	문동일 과 장 황석태 팀 장 최창근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수리시설 개보수사업
② 추진배경	○ 농업용 저수지 중 노후·파손 또는 기능이 저하된 부분 보수·보강 ○ 노후시설 정비로 물 손실 최소화 및 농업용수의 안정적 공급기여
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 12. ~‘23. 12.(3년간) ○ 위 치 : 미암면, 금정면, 서호면 ○ 사 업 량 : 3개지구, 저수지 3개소 ○ 사업내용 - 계속사업지구 □ 미암 성산지구 저수지 보수 / 700백만원 □ 금정 냉천2제 저수지 보수 / 800백만원 □ 서호 소산제 저수지 보수 / 1,000백만원 ○ 총사업비 : 2,500백만원(도비 2,00080%, 군비 50020%) -‘22년 600백만원(도비 48080%, 군비 12020%)
④ 사업부서	건설교통과		⑤ 담당자	과 장 최흥섭 시설8급 박청운
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 미암 성산지구 수리시설 개보수사업 - 시행계획 승인 요청(전라남도)		‘22. 3.	문동일 과 장 황석태 팀 장 박청운 주무관
○ 금정 냉천2제 수리시설 개보수사업 - 실시설계용역 시행		‘22. 1.	문동일 과 장 황석태 팀 장 박청운 주무관
○ 서호 소산제 수리시설 개보수사업 - 실시설계용역 시행		‘22. 1.	문동일 과 장 황석태 팀 장 박청운 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암 달맞이공원 조성사업
② 추진배경	○ 특색있는 공원 조성 및 랜드마크화를 통해 지역민 정주여건 개선 및 관광객 유입효과로 지역경제 활성화
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘19. ~‘23.(5년간) ○ 위 치 : 영암읍 서남리 971번지 일원 ○ 사업내용 : 경관보도교, 전망대, 바닥분수, 관리사, 산책로 조성 등 ○ 사업규모 : 19,582㎡ ○ 사 업 비 : 6,300백만원(도비 3,15050%, 군비 3,15050%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담 당 자	과 장 김동식 시설7급 박정민
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본‧실시설계 완료 및 공사 착공		‘22. 5.	소상원 부군수 김동식 과 장 박혜영 팀 장 박정민 주무관
○ 공원조성계획 변경 및 실시 계획 인가		‘22. 3.	소상원 부군수 김동식 과 장 박혜영 팀 장 박정민 주무관
○ 문화재 정밀발굴조사 완료		‘21. 8.	박종필 부군수 김동식 과 장 박혜영 팀 장 박정민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가		‘20. 12.	박종필 부군수 문동일 과 장 박이규 팀 장 박정민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암읍 도시재생 뉴딜사업
② 추진배경	○ 우리군의 지역적 여건 및 특성에 맞는 도시재생사업을 통해 침체된 골목상권 활성화 기반을 마련하고, 주민역량 강화 및 지역경제 활성화
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. ~‘24.(4년간) ○ 위 치 : 영암읍 동무리 144-1번지 일원 ○ 내 용 : 어울림복합센터, 새싹돌봄센터, 특화상점가 조성, 가로환경 개선사업 등 ○ 사 업 비 : 168억원(국비 7645%, 도비 138%, 군비 3823%, 기금 75%, 민간 3420%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담 당 자	과 장 김동식 시설7급 이택림
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 상가리모델링 지원사업 공고		‘22. 6.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 노후 집수리 지원사업 추진		‘22. 4.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 새싹돌봄센터 건축공사 실시 설계용역		‘22. 2.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 도시재생사업 편입건물 철거공사		‘21. 12.	박종필 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 어울림복합센터 및 새싹돌봄센터 건축기획용역		‘21. 9.	박종필 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 도시재생사업 편입부지 매입		‘21. 2.	박종필 부군수 문동일 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 영암읍 도시재생 뉴딜사업 공모 선정		‘20. 11.	박종필 부군수 문동일 과 장 손철진 팀 장 박정민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼호읍 도시재생 인정사업
② 추진배경	○ 삼호읍 용앙리(구도심)의 인구유출 및 기초생활SOC시설 부족으로 인해 동네커뮤니티 약화, 청년세대의 인구 유출 등 문제해결을 위해 문화공간 조성
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. ~‘24.(4년간) ○ 위 치 : 삼호읍 용앙리 322-1번지 일원 ○ 내 용 : 아우름돌봄센터, 카페, 체육센터, 공유부엌, 문화공간 조성 ○ 사 업 비 : 7,660백만원(국비 4,40057%, 지방비 3,26043%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담당자	과 장 김동식 시설7급 이택림
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 삼호 아우름 플랫폼 건축공사 설계용역 착수		‘22. 9.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 이택림 주무관
○ 영암군 공공건축위원회 기획심의		‘22. 3.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 사업 편입부지 매입		‘21. 12.	박종필 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 삼호 아우름 플랫폼 건축기획용역		‘21. 11.	박종필 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관
○ 삼호읍 도시재생 인정사업 공모 선정		‘21. 7.	박종필 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 임 한 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신활력 氣삼충전소, 학산 누리 플랫폼 조성사업
② 추진배경	○ 세대를 아우를 수 있는 문화 및 체육시설을 확충함으로써 낙후된 지역에 활력을 제공하여 주민공동체 강화 및 지역경제 활성화
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. ~‘24.(3년간) ○ 위 치 : 학산면 독천리 1268-1번지 일원 ○ 사업규모 : 학산누리센터 조성(연면적 1,600㎡) - 학산누리센터 1,600㎡(문화센터 700, 실내체육관 900) - 수변공원 조성 10,097㎡, 주차장 정비 100면, 도로 확장 L=340m, B=20m ○ 사 업 비 : 7,337백만원(국비 3,80052%, 지방비 3,53748%) -‘22년 : 1,650백만원,‘23년 : 1,196백만원,‘24년 : 4,491백만원
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담당자	과 장 김동식 시설7급 이상철
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 누리플랫폼 설계용역 착수		‘22. 11.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 이상철 주무관
○ 공공건축심의위원회 기획심의		‘22. 5.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관
○ 누리플랫폼 조성 건축기획용역		‘22. 3.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관
○ 편입토지 및 지장물 보상협의		‘22. 1.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관
○ 지역개발 공모사업 선정		‘21. 8.	박종필 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 지역개발사업
② 추진배경	○ 천황사 진입도로, 체험형 관광 레저시설의 진·출입로 개설로 관광네트워크가 연결되어 관광 활성화, 접근성 제고, 정주여건 개선으로 지역경제 활성화
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. ~‘26.(5년간) ○ 위 치 : 영암읍, 학산면 일원 ○ 사업규모 - 학산면 독천공원 우회도로 및 주차장 조성 (L=0.42km, B=9m) - 월출산 기스테이션F 기반시설 조성 (L=1.35km, B=11~18m) - 숲속 웰니스 체험시설 주차장 조성 (A=2,726㎡) ○ 사 업 비 : 18,000백만원(국비 15,00083%, 지방비 3,00017%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담 당 자	과 장 김동식 시설7급 이상철
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 구역지정 및 실시설계용역 착수		‘22. 9.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관
○ 지역개발사업 추진 사전평가		‘22. 4.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관
○ 지역개발계획(변경) 고시		‘22. 1.	소상원 부군수 김동식 과 장 손철진 팀 장 김용호 주무관
○ 성장촉진지역 지정		‘19. 1.	손점식 부군수 문동일 과 장 손철진 팀 장 최창근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금정면 기초생활거점 육성사업
② 추진배경	○ 정주생활권 거점지 기능 중요성이 대두됨에 따라 행정기능을 강화하고 주거환경 및 편의시설 정비와 기반시설 확충을 통한 중심지 활성화 도모를 위한 복합거점 기능 강화 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘19. ~‘23.(5년간) ○ 사업위치 : 금정면 용흥리 소재지 일원 ○ 사업내용 - 기초생활기반확충 : 복지예감문화관 조성 - 지역경관개선 : 행복광장 조성 - 지역역량강화 : 주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 정보화 등 ○ 사 업 비 : 3,932백만원(균특 2,75270%, 군 1,18030%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담당자	과 장 김동식 시설7급 박정훈
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 광장 조성(토목) 공사 착공		‘22. 11.	소상원 부군수 김동식 과 장 김대웅 팀 장 박정훈 주무관
○ 시행계획 수립 및 고시		‘22. 8.	소상원 부군수 김동식 과 장 이명돈 팀 장 박정훈 주무관
○ 사업부지 확보		‘22. 4.	소상원 부군수 김동식 과 장 이명돈 팀 장 문기팽 주무관
○ 기본계획 수립 및 고시		‘21. 1.	박종필 부군수 문동일 과 장 김희수 팀 장 문기팽 주무관
○ 기본계획 수립용역 완료		‘20. 5.	손점식 부군수 문동일 과 장 임경한 팀 장 이상철 주무관
○ 2019년 신규 공모사업 선정		‘18. 10.	황인섭 부군수 이영현 과 장 류미아 팀 장 오상운 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군서면 기초생활거점 육성사업
② 추진배경	○ 정주생활권 거점지 기능 중요성이 대두됨에 따라 행정기능을 강화하고 주거환경 및 편의시설 정비와 기반시설 확충을 통한 중심지 활성화 도모를 위한 복합거점 기능 강화 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. ~‘25.(4년간) ○ 사업위치 : 군서면 동구림·서구림, 도갑리 일원 ○ 사업내용 - 기초생활기반확충 : 어울터(거점센터) 조성, 어울터 활성화프로그램 - 지역경관개선 : 어울마당 조성 - 지역역량강화 : 주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 정보화 등 ○ 사 업 비 : 4,000백만원(균특 2,80070%, 군 1,20030%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담당자	과 장 김동식 시설7급 박정훈
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 편입토지 협의 완료		‘22. 5.	소상원 부군수 김동식 과 장 이명돈 팀 장 박정훈 주무관
○ 기본계획 수립용역 착수		‘22. 3.	소상원 부군수 김동식 과 장 이명돈 팀 장 박정훈 주무관
○ 2022년 신규 공모사업 선정		‘21. 6.	박종필 부군수 문동일 과 장 김희수 팀 장 문기팽 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군서면 기초생활거점 육성사업
② 추진배경	○ 정주생활권 거점지 기능 중요성이 대두됨에 따라 행정기능을 강화하고 주거환경 및 편의시설 정비와 기반시설 확충을 통한 중심지 활성화 도모를 위한 복합거점 기능 강화 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. ~‘25.(4년간) ○ 사업위치 : 군서면 동구림·서구림, 도갑리 일원 ○ 사업내용 - 기초생활기반확충 : 어울터(거점센터) 조성, 어울터 활성화프로그램 - 지역경관개선 : 어울마당 조성 - 지역역량강화 : 주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 정보화 등 ○ 사 업 비 : 4,000백만원(균특 2,80070%, 군 1,20030%)
④ 사업부서	도시디자인과		⑤ 담당자	과 장 김동식 시설7급 박정훈
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 편입토지 협의 완료		‘22. 5.	소상원 부군수 김동식 과 장 김대웅 팀 장 박정훈 주무관
○ 기본계획 수립용역 착수		‘22. 3.	소상원 부군수 김동식 과 장 김대웅 팀 장 박정훈 주무관
○ 2022년 신규 공모사업 선정		‘21. 6.	소상원 부군수 김동식 과 장 김대웅 팀 장 박정훈 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노후 상수관망 정비사업
② 추진배경	○ 노후 상수관망 정비로 녹물발생, 이물질 유입 예방 및 누수 저감을 통해 안전하고 안정적인 수돗물 공급
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘19. ~‘24.(6년간) ○ 위 치 : 영암읍, 삼호읍, 군서면, 학산면 일원 ○ 사 업 량 : 노후 상수관로 정비 55km, 블록구축 및 정비 34개소, 유지관리시스템 구축 등 ○ 총사업비 : 31,300백만원(국비 21,90070%, 군비 9,40030%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담 당 자	소 장 문동일 시설6급 김용호
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암 노후상수관망 정비공사 (영암읍, 삼호읍) 시행		‘22. 11.	문동일 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관
○ 관망운영관리 및 누수탐사용역 시행(총괄, 1차분) ○ 유지관리시스템 제조 및 구매 설치		‘21. 05 ‘21. 12	전동평 군 수 박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 영암 지방상수도 현대화사업 소블록 시스템 구축공사 시행 (총괄분 및 1차분)		‘20. 11.	전동평 군 수 박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 영암 지방상수도 현대화사업 중블록 시스템 구축공사 시행		‘20. 5.	손점식 부군수 최흥섭 소 장 고 율 팀 장 김희수 팀 장 문기팽 주무관
○ 영암군 지방상수도 현대화사업 건설사업관리(CM)·기본 및 실시설계용역 시행		‘19. 6.	손점식 부군수 마인구 소 장 오병준 팀 장 양동채 팀 장 문기팽 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업
② 추진배경	○ 상수도 미급수 지역에 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하여 주민보건 및 주거환경 개선
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. ~‘23.(4년간) ○ 위 치 : 군서면, 시종면, 도포면 일원 ○ 사 업 량 : 배수관 매설 6.842㎞(D200~500㎜) ○ 총사업비 : 5,768백만원(도비 4,55679%, 군비 1,21221%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담 당 자	소 장 문동일 시설6급 김용호
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업 시행(2차분)		‘22. 6.	소상원 부군수 최흥섭 소 장 김동열 팀 장 최창근 주무관
○ 도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업 시행(총괄분 및 1차분)		‘21. 5.	전동평 군 수 박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업 설계안전성 검토용역		‘21. 1.	최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업 기본 및 실시설계 용역 시행		‘20. 4.	손점식 부군수 최흥섭 소 장 고 율 팀 장 김희수 팀 장 문기팽 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업
② 추진배경	○ 상수도 미급수 지역에 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하여 주민보건 및 주거환경 개선
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. ~‘24.(4년간) ○ 위 치 : 미암면 신한리 일원 ○ 사 업 량 : 배수관 매설 4.6㎞(D600㎜이하) ○ 총사업비 : 5,000백만원(도비 3,95079%, 군비 1,05021%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담 당 자	소 장 문동일 시설6급 김용호
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 지장사~송죽정구간 매설완료 (1차분, L=0.6km)		‘22. 11.	문동일 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관
○ 신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업 시행		‘22. 6.	소상원 부군수 최흥섭 소 장 김동열 팀 장 최창근 주무관
○ 신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업 설계안정성 검토용역 시행		‘22. 2.	최흥섭 소 장 김동열 팀 장 박건웅 주무관
○ 신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업 지질조사용역 시행		‘21. 5.	최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 신한지구 농어촌 지방상수도 기본 및 실시설계용역 시행		‘21. 3.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업 기본 및 실시설계 용역 계약심사 의뢰		‘21. 3.	최흥섭 소 장 이상용 팀 장 정철민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	스마트 지방상수도 관망관리 인프라 구축사업
② 추진배경	○ 수돗물 공급과정에 ICT 기반 감시체제를 구축하여 상수도 사고 발생을 사전에 방지 ○ 상수도 사고에 신속한 대응이 가능하도록 감시시스템 개선 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. ~‘23.(3년간) ○ 위 치 : 영암군 일원 ○ 사업내용 : 정밀여과장치, 재염소설비, 자동 수질측정장치, 관세척, 스마트미터링, 소규모 유량수압 감시시스템, 실시간수압계, 자동드레인 등 ○ 총사업비 : 5,015백만원(국비 3,51170%, 군비 1,50430%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담 당 자	소 장 문동일 시설7급 박창호
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 스마트 관망관리 인프라구축 사업(정보통신외8개공정) 발주		‘22. 11.	우승희 군 수 소상원 부군수 문동일 소 장 김선동 팀 장 박창호 주무관
○ 스마트 관망관리 인프라구축 사업 계약심사 의뢰		‘22. 6.	최흥섭 소 장 김동열 팀 장 박건웅 주무관
○ 스마트 관망관리 인프라구축 사업 차염시설 설치공사 시행		‘21. 12.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 박항성 팀 장 정철민 주무관
○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 디지털 수도미터 설치공사 시행		‘21. 5.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 스마트 관망관리 인프라구축 운영시스템통신개량공사 시행		‘21. 4.	최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이원빈 주무관
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계용역 시행		‘21. 3.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 정철민 주무관
○ 스마트 관망관리 운영시스템 통신 개량공사 시행		‘21. 2.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암군 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 군서정수장 고도정수처리시설
② 추진배경	○ 상수도 수요량의 예측과 장·단기 계획에 의한 수도시설의 체계적이고 계획적인 정비를 통하여 시설 투자의 효율성을 제고 ○ 군서 정수장 원수의 수질 저하로 고도정수처리시설 계획 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. ~‘23.(4년간) ○ 위 치 : 영암군 일원 ○ 사업내용 : 수도정비기본계획(변경)수립 1식, 군서정수장 고도정수처리시설 기본설계 1식 ○ 총사업비 : 1,208백만원(군비 1,208100%) ※ 환경부와 협의관계로 과업수행 일시정지(150일)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담 당 자	소 장 문동일 시설6급 김용호
⑥ 선정기준	3천만원 이상 용역		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암군 수도정비 기본계획(변경) 설계용역 중지(환경부협의관련)		‘22. 10.	문동일 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관
○ 영암군 수도정비 기본계획(변경) 본안 검토 (환경부)		‘22. 8.	최흥섭 소 장 김동열 팀 장 최창근 주무관
○ 영암군 수도정비 기본계획(변경) 초안보고서 검토 요청		‘21. 3.	최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 영암 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 군서정수장 고도정수 처리시설 기본설계용역(2차분) 시행		‘21. 1.	최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 영암 수도정비 기본계획(변경) 및 군서정수장 고도정수처리 평가위원회 구성·운영 계획(안)		‘20. 7.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 이상용 팀 장 이택림 주무관
○ 영암군 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 군서정수장 고도정수 처리시설 기본설계용역 시행		‘20. 6.	전동평 군 수 손점식 부군수 김희수 팀 장 최흥섭 소 장 문기팽 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼호 동암지구 하수관로 정비사업
② 추진배경	○ 삼호읍 산호, 난전, 삼포리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘19. 1. ~‘23. 3.(5년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=14.81km, 배수설비 433개소 ○ 총사업비 : 14,573백만원(국비 8,82061%, 지방비 5,75339%) ※ 공정율 : 62%
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담 당 자	소 장 문동일 시설7급 장우영
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 삼호 동암지구 하수관로 정비사업 시행(4차분) - 정개마을 L=2.1㎞		‘22. 6.	전동평 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 삼호 동암지구 하수관로 정비사업 시행(3차분) - 동암, 가내항, 엄포마을 L=7.6㎞		‘22. 1.	전동평 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 삼호 동암지구 하수관로 정비사업 시행(2차분) - 검길, 도움전, 당두마을 L=2.4㎞		‘21. 3.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 삼호 동암지구 하수관로 정비사업 시행(총괄 및 1차분) - 난대마을 L=2.6㎞		‘20. 6.	전동평 군 수 손점식 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상용 주무관
○ 삼호 동암지구 하수관로 및 신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 시행		‘18. 11.	황인섭 부군수 문동일 소 장 황석태 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암 영리지구 하수관로 정비사업
② 추진배경	○ 덕진면 영등, 백계, 운암리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 1. ~‘23. 12.(4년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=12.2km, 배수설비 246개소 ○ 총사업비 : 9,777백만원(국비 5,37755%, 지방비 4,40045%) ※ 공정율 : 26%
ks④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설7급 장우영
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 영리지구 하수관로 정비공사 시행(3차분) - 청계, 송석정마을 L=1.5㎞		‘22. 6.	소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 영리지구 하수관로 정비공사 시행(2차분) - 영리, 망동, 장등마을 L=2.8㎞		‘22. 1.	전동평 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 영리지구 하수관로 정비공사 시행(총괄 및 1차분) - 영리, 망동, 청계, 장등마을 L=2.0㎞		‘21. 6.	전동평 군 수 박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 통합 건설사업관리용역 시행		‘21. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 2020년 하수관로 및 농어촌 마을하수도 정비사업 설계 용역 시행		‘19. 11.	손점식 부군수 마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영암 월암지구 하수관로 정비사업
② 추진배경	○ 군서면 월곡, 도장, 동호, 성양, 마산리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 1. ~‘23. 12.(4년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=22.9km, 배수설비 623개소 ○ 총사업비 : 19,659백만원(국비 10,92156%, 지방비 8,73844%) ※ 공정율 : 10%
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설7급 장우영
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 영암 영리지구 하수관로 정비공사 시행(2차분) - 월암, 월산, 주암마을 L=3.0㎞		‘22. 1.	전동평 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 영암 영리지구 하수관로 정비공사 시행(총괄 및 1차분) - 월곡마을 L=3.7㎞		‘21. 6.	전동평 군 수 박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 통합 건설사업관리용역 착수		‘21. 6.	전동평 군 수 박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 2020년 하수관로 및 농어촌 마을 하수도 정비사업 설계용역 완료		‘21. 3.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 2020년 하수관로 및 농어촌 마을 하수도 정비사업 설계용역 시행		‘19. 11.	손점식 부군수 마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서호 영풍지구 하수관로 정비사업
② 추진배경	○ 서호면 엄길, 쌍풍리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 1. ~‘25. 12.(5년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=5.59km, 배수설비 105개소 ○ 총사업비 : 5,476백만원(국비 3,83370%, 지방비 1,64330%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설7급 장우영
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 서호 영풍지구 하수관로 정비 사업 시행(총괄 및 1차분)		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 서호 영풍지구 하수관로 정비 사업 설치인가 완료		‘22. 7.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 통합 건설사업관리용역 계약 심사 요청		‘22. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 재원조달 및 설계자문 협의 요청		‘21. 12.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 2021년 하수관로 및 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 PQ완료 및 가격입찰 시행		‘21. 1.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 2021년 하수관로 및 농어촌 마을 하수도 정비사업 설계용역 시행		‘20. 12.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노후하수관로 정비사업
② 추진배경	○ 영암읍, 삼호읍 일원의 노후된 하수관로를 굴착 및 비굴착 보수하여 지반공동화 및 토양오염을 방지하기 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. 1. ~‘24. 12.(3년간) ○ 사업내용 : 노후관로 L=6.2km(굴착 5.6㎞, 비굴착 0.6㎞) ○ 총사업비 : 6,600백만원(국비 3,30050%, 지방비 3,30050%) ※ 설계중
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설7급 장우영
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 노후하수관로 정비사업 우회 관로 영산강유역환경청 협의		‘22. 7.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 노후하수관로 비굴착 보수공법 전라남도 사전 협의완료		‘22. 6.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 하수관로 노선계획 선정, 측량 및 관로설계		‘21. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 및 노후 하수관로 설계용역 PQ완료 및 가격입찰 시행		‘22. 1.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 및 노후 하수관로 설계용역 시행		‘21. 12.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신북 금동지구 농어촌마을하수도 정비사업
② 추진배경	○ 신북면 양계, 학동, 갈곡리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘19. 1. ~‘22. 12.(4년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=11.88km, 배수설비 292개소, 금동소규모 하수처리장(신설) 용량 (120㎥/일) ○ 총사업비 : 10,620백만원(국비 7,05666%, 지방비 3,56434%) ※ 공정율 : 45%
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설8급 정철민
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 시행 (4차분)		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 시행 (3차분)		‘22. 2.	전동평 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 시행 (2차분)		‘21. 3.	박종필 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 신북 금동지구 농어촌마을하수도 정비사업 시행 (총괄 및 1차분)		‘20. 6.	전동평 군 수 손점식 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 재원협의 조치결과 보고서제출		‘20. 3.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 통합 건설사업관리 용역 시행		‘19. 4.	손점식 부군수 마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관
○ 삼호 동암지구 하수관로 및 신북 금동지구 농어촌마을하수도 정비사업 설계용역 시행		‘18. 11.	황인섭 부군수 문동일 소 장 황석태 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업
② 추진배경	○ 금정면 월평, 용흥리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 1. ~‘25. 12.(5년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=3.0km, 배수설비 66개소 ○ 총사업비 : 3,167백만원(국비 2,21770%, 지방비 95030%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설8급 정철민
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 금정 아천지구(2단계) 농어촌 마을하수도 정비사업 시행(총괄분 및 1차분)		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 아천지구(2단계) 농어촌 마을하수도 정비사업 설치인가 완료		‘22. 7.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 금정 아천지구(2단계) 농어촌 마을하수도 정비사업 계약 심사 완료		‘22. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 재원조달 및 설계자문 협의 요청		‘21. 12.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 2021년 하수관로 및 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 PQ완료 및 가격입찰 시행		‘21. 1.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 2021년 하수관로 및 농어촌 마을 하수도 정비사업 설계용역 시행		‘20. 12.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	미암 문수지구 농어촌마을하수도 정비사업
② 추진배경	○ 미암면 신포리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘20. 1. ~‘24. 12.(5년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=13.2km, 배수설비 315개소, 문수하수처리장 용량증설 (40⇒170㎥/일) ○ 총사업비 : 13,429백만원(국비 8,54064%, 지방비 4,88936%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설8급 정철민
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 시행 (총괄분 및 1차분)		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설치인가 완료		‘22. 8.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 재원협의 완료		‘22. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 건설기술심의 완료		‘21. 10.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 미암 문수지구 농어촌마을하수도 정비사업 공법선정 완료		‘21. 2.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 2020년 하수관로 및 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 PQ완료 및 가격입찰 시행		‘19. 12.	마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관
○ 2020년 하수관로 및 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 시행		‘19. 11.	손점식 부군수 마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업
② 추진배경	○ 학산면 금계, 상월, 용소리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리 하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘21. 1. ~‘24. 12.(4년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=8.6km, 배수설비 266개소, 지소하수처리장 용량증설 (40⇒110㎥/일) ○ 총사업비 : 7,425백만원(국비 5,19870%, 지방비 2,22730%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설8급 정철민
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>
○ 하수처리장 부지 재협의		‘22. 8.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 하수처리공법 선정 완료		‘22. 6.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 하수처리장 부지 협의		‘21. 12.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 처리시설 기술진단 및 증설 방안 영산강유역환경청 협의		‘21. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 학산 지소지구 용역 착수 및 현장조사(측량 등)		‘21. 2.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 신 훈 주무관
○ 2021년 하수관로 및 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 PQ완료 및 가격입찰 시행		‘21. 1.	마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관
○ 2021년 하수관로 및 농어촌마을 하수도 정비사업 설계용역 시행		‘20. 11.	손점식 부군수 마인구 소 장 김선동 팀 장 김용호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업
② 추진배경	○ 시종면 신흥, 월악리 일원에서 발생하는 하수를 차집 처리하여 방류 수역의 수질 보전 및 주민 보건위생 향상을 위함
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. 1. ~‘25. 12.(4년간) ○ 사업내용 : 오수관로 L=8.7km, 배수설비 256개소, 월악하수처리장 용량증설 (40⇒100㎥/일) ○ 총사업비 : 9,760백만원(국비 6,83270%, 지방비 2,98230%)
④ 사업부서	수도사업소		⑤ 담당자	소 장 문동일 시설8급 정철민
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 정비사업 공법선정 대상 전라남도 사전 협의 완료		‘22. 7.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 정비사업 측량 (관로 및 가정 배수설비)		‘22. 5.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 정비사업 토질조사 시행		‘22. 4.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 정비사업 관로 노선 선정		‘22. 3.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 장우영 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 및 노후하수관로 정비 사업 설계용역 PQ완료 및 가격입찰 시행		‘22. 1.	최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관
○ 시종 월악지구 농어촌마을 하수도 및 노후하수관로 정비 사업 설계용역 시행		‘21. 12.	소상원 부군수 최흥섭 소 장 김선동 팀 장 이상철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대불산단 자전거도로 개설공사
② 추진배경	○ 자전거 전용 도로나 차선이 없어 자전거의 도로 통행에 따른 교통사고 노출 및 교통사고 발생 시 중상 또는 사망의 위험 상존 ○ 조선업 특화 산업단지인 대불국가산업단지의 안전ㆍ환경ㆍ교통 문제를 해소하고, 노후거점산업단지의 활력증진과 경쟁력 강화
③ 사업개요	○ 사업기간 :‘22. 1. ~ 12. (단년도) ○ 대 상 지 : 대불산단 내 용앙로 등 7개 도로 ○ 사업내용 : 자전거도로 설치(L=7,450m, B=2~3m) ○ 사 업 비 : 2,050백만원 (국비 1,00049%, 군비 1,05051%)
④ 사업부서	대불기업지원단		⑤ 담당자	단 장 김광호 공업9급 류형철
⑥ 선정기준	5억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 대불국가산업단지 자전거도로 설치공사 1구간 준공, 3구간발주		‘22. 10.	우승희 군 수 소상원 부군수 김광호 단 장 오상운 팀 장 류형철 주무관
○ 대불국가산업단지 자전거도로 (2구간) 설치공사 발주		‘22. 7.	우승희 군 수 소상원 부군수 횡태용 소 장 이명선 팀 장 류형철 주무관
○ 대불국가산업단지 자전거도로 설치공사 1~3구간 실시설계 ※ 1~3구간 순차발주		‘22. 1. ~‘22. 7.	전동평 군 수 소상원 부군수 황태용 소 장 이명선 팀 장 류형철 주무관
○ 특별교부세 교부		‘21. 12.	전동평 군 수 박종필 부군수 마인구 소 장 이상용 팀 장 이우석 주무관
○ 대불국가산업단지 자전거도로 개설공사 계획(안)		‘21. 11.	전동평 군 수 박종필 부군수 마인구 소 장 이상용 팀 장 이우석 주무관