1-14		영암근린공원 재정비

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				2,000	-	250	1,750	-
완료시기	임기내 ■ 임기후 □
사업기간	2023 ~ 2026		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(도시디자인과)		공약담당	경관디자인팀장 김은화 ☎ 2431 경관디자인팀원 박정민 ☎ 2433
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 현충공원 이전에 따른 영암 근린공원 재정비

❍ 영암읍 도시재생사업과 연계한 명품 산책로 정비

□ 현    황

❍ 공원결정고시 : 전고 제2009-212호(2009. 4. 27.)

❍ 공원시설 : 충혼탑, 위패봉안실, 기념비, 팔각정, 체력단련시설 등

❍ 공원내 사유지 현황

- 영암읍 역리 300, 223-2, 224 (3필지, 6,964㎡) / 가감정가액 1,400백만원

□ 사업개요

❍ 위    치 : 영암읍 동무리 160-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)

❍ 사업내용 : 현충공원 이전에 따른 공원정비(편의시설 및 산책로 정비)

❍ 사업규모 : 21,940㎡

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(도비 25012.5%, 군비 1,75087.5%)

※ 도비(250백만원) 확보사업 : 관광자원개발사업(균특회계)

※ 상기 추진계획은 현충시설 이전 후 추진 가능

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023	공원조성계획 수립	▪ 공원조성계획 수립
2024	기본 및 실시설계	▪ 기본 및 실시설계
		▪ 실시계획인가 신청 및 승인
2025	공사 시행	▪ 중앙토지수용위원회 토지수용 협의
		▪ 공사 착공
2026	공사 시행	▪ 공사 준공

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	2,000		100	200	1,450	250
국 비
도 비	250					250
군 비	1,750		100	200	1,450
민 자

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
추진사항		조성계획수립 추진	실시설계 추진	공사 착공	공사 준공

□ 기대효과

❍ 영암읍 중심 근린공원 재정비로 지역민 휴식공간 제공

❍ 군민 체력증진과 건강한 여가활동을 통한 삶의 질 향상

※ 영암읍 도시재생사업과 연계한 정비로 공원 이용률 제고에 기여