1-18		군부대 이전 및 유스호스텔 유치

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☑ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				45,000			45,000
완료시기	임기내 □ 임기후 ☑
사업기간	2023 ~ 2026		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(군민안전과)		공약담당	안전정책팀장 최진석 ☎ 2136 안전정책팀원 이건형 ☎ 2139
중앙정부 도움 필요성		해당없음 □ 도움필요(제도 ☑ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 기찬랜드는 영암 대표적인 문화·관광단지이나 주변 상반되는 군부대가 있어 이전 필요성 대두

❍ 군부대 이전을 통한 문화관광단지의 확장과 일자리 창출에 기여코자함.

□ 현    황

❍ 육군 8539부대 5대대(왕인대대) 현황

- 부대인원 : 총원 135명(간부 20명, 군무원 25명, 병사 90명)

- 부대시설 : 생활관, 식당, 탄약고 등 건물 24동, 연병장, 사격장

※‘23. 행정관, 독신자숙소, 식당 등 신축, 사업비 100억원 투입

❍ 타지자체 군부대 이전 사례

구 분	울산 남구(연대)	보은군(대대)
소 재 지	옥동 233-4 일원	장안면 개안리 229-4
면 적	105,263㎡	41,027㎡
사업비	1,175억원(부지매입 200억, 시설비 975억원)	188억원(시설비)
추진상황	‘18. ~ 추진중(국방부 합의각서 승인)	‘14. ~ 추진중(승인완료, 설계중)

❍ 관련 법령 : 국방·군사시설 사업에 관한 법률

□ 사업개요

❍ 위    치 : 영암읍 회문리 584번지 일원(부지35,027㎡, 21필지)

❍ 사업기간 :‘23. 01. ~‘29. 12.

- 1단계 :‘23. ~‘25.(국방부 이전협의 및 부지확정)

- 2단계 :‘26. ~‘29.(토지매입 및 이전시설 건설)

❍ 사업내용 : 군부대 이전(건물 24동, 연병장, 사격장 등)

❍ 사 업 비 : 45,000백만원(군비100%)

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023 ~2025	계획단계 (이전계획 작성 및 이전협의)	▪ 군부대 이전 대체부지 선정
		▪ 기본구상 및 타당성 조사 용역
		▪ 군부대 이전 국방부 합의
2026 ~2029	실시단계 (기본 및 실시설계, 공사 발주 및 준공 등)	▪ 합의각서 체결
		▪ 기본 및 실시설계 실시
		▪ 준공 및 양여재산 처리

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	45,000		100				44,900		100				44,900
국 비
도 비
군 비	45,000		100				44,900		100				44,900
민 자

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
군부대 이전 추진	군부대 이전 대체부지 선정	기본구상 및 타당성 조사	협의요청서 국방부 제출	국방부 협의요청서 검토	국방부 협의요청서 검토 및 합의각서 체결

□ 기대효과

❍ 군부대 이전부지 민자유치 숙박시설 조성으로 일자리 창출

❍ 영암읍과 기찬랜드내 부족한 숙박시설 확충으로 체류형 방문객