1-3		영보정·덕진여사 주변 관광자원화

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☑ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				400	-	-	400	-
완료시기	임기내 ☑ 임기후 □
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(문화관광과)		공약담당	문화자원팀장 송태갑 ☎ 2251 문화자원팀원 유동하 ☎ 2242
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ☑ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 영보풍향제 및 덕진여사 추모제의 지원 확대와 영보정 주변 관광자원화를 통하여 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화

□ 현    황

❍ 영보풍향제 및 덕진여사 추모제

- 덕진여사추모제(음력 5월 5일) : 5백만원 지원

- 영보풍향제(양력 5월 5일) : 10백만원 지원

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 영암군 덕진면 영보정 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026

❍ 사 업 비 : 400백만원

❍ 사업내용 : 영보마을 주변 관광자원화 타당성 조사 용역 실시

- 주민의견 수렴 및 주민 주도형 관광자원화 모색

- 영보정 주변 환경 및 시설물 관광 자원화

· 영보마을 대나무 숲길 활용

· 구)영보 초교를 활용한 관광자원 시설 : 예)유리온실(실내수목원 및 카페)

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023	영보정·덕진여사 주변 관광자원화	▪ 영보풍향제 봉행
		▪ 덕진여사 추모제 봉행
		▪ 영보정주변 관광자원화 타당성 조사용역 실시
2024	영보정·덕진여사 주변 관광자원화	▪ 영보풍향제 봉행
		▪ 덕진여사 추모제 봉행
		▪ 타당성 조사용역 결과에 따라 사업추진
2025	영보정·덕진여사 주변 관광자원화	▪ 영보풍향제 봉행
		▪ 덕진여사 추모제 봉행
		▪ 타당성 조사용역 결과에 따라 사업추진
2026	영보정·덕진여사 주변 관광자원화	▪ 영보풍향제 봉행
		▪ 덕진여사 추모제 봉행
		▪ 타당성 조사용역 결과에 따라 사업추진

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	400		20	80	100	200
국 비
도 비
군 비	400		20	80	100	200
민 자

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
영보정 주변 관광자원화	-	타당성 용역	영보정 및 덕진여사 주변 관광자원 설계용역	대나무 숲길 조성	문화공간 조성

□ 기대효과

❍ 영보정 주변 관광자원화와 영보풍향제 및 덕진여사 추모제 지원 확대를 통해 현대와 전통이 어우러진 주민주도형 관광콘텐츠로 발전시켜 관광객

유입을 통한 지역경제 활성화