10-1		실내 가상현실 스포츠센터 설치

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 □ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				967			967
완료시기	임기내 □ 임기후 □
사업기간	2023 ~ 2027		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(스포츠산업과)		공약담당	스포츠정책팀장 류동식 ☎ 2258 스포츠정책팀원 김한얼 ☎ 2224
중앙정부 도움 필요성		해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 제4차 산업혁명의 핵심기술인 가상현실을 스포츠와 접목한 콘텐츠 구축을 통해 스포츠관광 활성화 추구

❍ 초ㆍ중등학교 학생들의 실내체육 및 여가활동 장소 제공을 통해 교육여건 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 영암읍 역리 94-4번지 일원

❍ 기    간 : 2023년 ~ 2027년

❍ 사 업 비 : 967백만원(콘텐츠제작 800, 타당성 및 실시설계용역 167)

❍ 사업내용 : VR 및 AR체험관 10종(VR퓨처바이크, 클레이사격 등)

❍ 사업규모 : 330㎡(체육인 숙박시설 1층)

전문가 의견 수렴

✔ 광주전남연구원 이진의 박사

✔ 기술확보를 위한 콘텐츠 업체 교류 및 협력 체계 구축 필요

- 기본계획수립 시 콘텐츠 업체 파악 및 협력 체계 구축 방안 마련

✔ 향후 기술적 전문 인력 확보 및 유지 방안

- 지속가능한 콘텐츠 활용을 위해 콘텐츠 업체 선정 시 의견 반영 추진

✔

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용	비 고
2023	기본계획 수립	▪ 기본계획 및 타당성 조사 용역	▪ 숙박시설 조성사업 연계 추진
2024 ~ 2025	실시설계 용역	▪ 사전행정절차이행 ▪ 설계공모 및 실시설계 용역
2026 ~	실내가상현실 스포츠센터 설치	▪ 공사 착공
		▪ VR체험 콘텐츠 제작

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	967		67	100	150	250	400		67
국 비
도 비
군 비	967		67	100	150	250	400		67
민 자

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
실내가상현실센터 설치	기본계획 및 타당성조사용역	사전행절절차이행	실시설계용역	센터 착공

□ 기대효과

❍ 다양한 가상 스포츠 콘텐츠 체험을 통해 성인은 물론 어린이 및 청소년의 관심과 참여를 유도하여 영암군에 대한 자부심 고취

❍ 주변의 체육시설들과 연계를 통한 관광산업의 활성화로 지역경제 활성화에 기여

□ 참고자료

Ⅰ	유사사례 검토 (함평엑스포공원 VR체험장)

□ 추진배경

❍ 함평엑스포공원 각종 축제와 연계한 다양한 즐길거리 제공을 통해 체류형 관광 활성화 도모

❍ 초ㆍ중등학교 학생들의 실내체육 및 여가활동 장소 제공을 통해 교육여건 개선 추구

□ 사업계요

❍ 위    치 : 함평엑스포사업소 (1층)

❍ 사업기간 : 2020. 9. ~ 2021. 7.

❍ 사 업 비 : 578백만원(도비50%, 군비50%)

❍ 사 업 량 : VR체험 12종, AR체험 2종

- VR체험 : VR로봇, VR드론, VR페러글라이딩, VR영상체험 등)

- AR체험 : 클레이사격, 스크린축구

□ 운영현황

❍ 이용시간 : 주6일(월요일 휴무)

❍ 이용객수 : 연간 3,300명 / 연간수입 : 95,700천원

❍ 이 용 료 : 개인 4,000원(1회권) / 함평군민 2,800원

❍ 운영주체 : 위탁운영 / 함평축제관광재단

□ VR체험기(로봇, 드론, 영상체험 등)

□ AR체험기(클레이사격, 스크린축구)