10-13		도시가스 미공급 지역 에너지 보급 지원

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 □ 계 속 ■		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				343.4	150	4.4	189
완료시기	임기내 ■ 임기후 □
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(일자리경제과)		공약담당	에너지산업팀장 손병희 ☎ 2610 에너지산업팀원 전종훈 ☎ 2612
중앙정부 도움 필요성		해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 ■ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 에너지 보급을 지원하여 도시가스 미공급지역의 에너지사용 편의성 향상

❍ 효율적인 에너지관리를 통해 기존 대비 에너지 비용 절감

❍ 시설개선을 통한 주택 내 가스사용 안전성 확보

□ 현    황

❍ 「도시가스사업법」상 군 대부분지역은 경제성확보 미달지역(100ｍ당 45가구 미만)으로 분류

❍ 경제성확보 미달지역 등 도시가스 미공급지역의 에너지복지 사업 필요

❍ 주택 내 고무호스를 사용하는 가구가 약 2,000세대로 추정, 가스시설 안전성 확보가 필요

□ 사업개요

❍ 사업기간 : `22. ∼ `26.

❍ 위    치 : 관내 도시가스 미공급지역 및 가스안전 취약지역

❍ 사 업 비 : 343.4백만원(국 150, 도 4.4, 군 189)

❍ 사업내용 : LPG소형저장탱크 보급(사회복지시설 등), LPG용기 사용가구 시설개선, 가스안전장치(타이머콕) 지원

❍ 사 업 량 : 저장탱크 90개소, 시설개선 650개소, 안전장치 1,800개소

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2022	조례 제정 및 사업시행	▪ 액화석유가스 공급 지원에 관한 조례 제정
2023 ~ 2026	LPG소형저장탱크 보급사업,사회복지시설 LPG소형저장탱크 지원사업, LPG용기 사용가구 시설개선사업, 가스안전장치 보급사업	▪ 에너지보급 지원 계획 수립
		▪ 수요조사 및 사업대상자 선정
		▪ 사업추진(사업 간 연계추진)
		▪ 개선사항 점검 및 검수
		▪ 에너지보급 지원 완료 및 정산

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	343.4	78	78	78	54.7	54.7
국 비	150	34	34	34	24	24
도 비	4.4	1	1	1	0.7	0.7
군 비	189	43	43	43	30	30
민 자

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	계	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
LPG 시설개선(가구)	650	150	150	150	100	100

□ 기대효과

❍ 기존 대비 에너지 비용 절감으로 에너지복지 증진 및 삶의 질 향상

❍ 가스시설의 현대화로 에너지 사용의 안전성 확보