10-2		영암읍성 복원

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☑ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				870	-	-	870	-
완료시기	임기내 □ 임기후 ☑
사업기간	2022 ~ 2029		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(문화관광과)		공약담당	문화자원팀장 송태갑 ☎ 2635 문화자원팀원 김호범 ☎ 2636
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ☑ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 읍성 복원을 통한 역사 문화 관광 자원화와 지역의 랜드마크 조성

❍ 전통 문화유산의 체계적인 보존과 보호 관리를 통한 문화재 보존

□ 현    황

❍ 영암읍성 일부 복원(석성 35m)              :‘01. 09. ~ 12.

❍ 영암읍 소도읍 육성사업(지표조사)           :‘07. 06. ~ 07.

❍ 영암읍 소도읍 육성사업(시굴조사)           :‘09. 06. ~ 08.

❍ 달맞이공원 조성사업(문화재 정밀발굴조사)   :‘21. 04. ~ 08.

❍ 영암읍성 보존 및 활용방안 연구 용역       :‘21. 09. ~ 11.

❍ 영암읍성 문화재 복원공사(읍성 성곽 복원)   :‘22. 06.  ~ ‘23. 11.

❍ 영암읍성 해자확인을 위한 시굴조사         :‘22. 12.

□ 사업개요

❍ 위  치 : 영암읍 교동리~서남리~역리~동무리~남풍리

❍ 규  모 : 2,000m

❍ 사업비 : 870백만원

※ 타당성 조사 결과 : 시·발굴 2,888백만원, 남문 복원 1,500백만원

❍ 내  용 : 잔존구간 정밀발굴 조사 및 원형 복원

- 1단계(‘22 ~‘26) : 영암읍성 일부 구간 정밀발굴 조사 및 학술대회 개최

- 2단계(‘27 ~‘29) : 영암읍성 복원 및 활용

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2022	영암읍성 시굴조사	▪ 영암읍성 시굴조사(일부 구간)
2023	영암읍성 정밀발굴조사	▪ 영암읍성 복원 대상지 선정
		▪ 영암읍성 복원 대상지 지표조사, 토지매입 및 발굴
2024	영암읍성 정밀발굴조사	▪ 영암읍성 복원 대상지 발굴 및 전문가 고증
2025	영암읍성 복원 추진	▪ 영암읍성 복원 타당성 용역(일부 복원)
2026	영암읍성 복원 추진	▪ 영암읍성 일부 및 남문 복원 실시 설계 추진

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	870	670	50	50	50	50
국 비
도 비
군 비	870	670	50	50	50	50		670
민 자

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
시·발굴조사 및 복원	시굴조사	시‧발굴조사	발굴조사	복원타당성 용역	실시 설계 용역

□ 기대효과

❍ 영암의 상징적 문화유산을 보전하여 교육 및 휴식 문화공간 제공

❍ 영암향교, 열무정 등 주변 문화재와 연계한 관광코스 개발로 관광객 유입 확대

❍ 영암읍권 대표 관광콘텐츠 개발로 지역 상권 활성화