10-9		철탑 지중화 (대불산단주거단지 고압송전선로 지중화사업)

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				48,000			24,000	24,000
완료시기	임기내 □ 임기후 ■
사업기간	2023 ~ 2030		추진상황	한국전력공사 협의 중
사업주체	영암군(일자리경제과)		공약담당	에너지산업팀장 손병희 ☎ 2610 에너지산업팀원 이우석 ☎ 2611
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 고압송전선로가 대불산단주거단지를 경유하여 도시미관 저해

❍ 전자파와 소음 공해로 인한 주거환경권 침해 및 주민 불안감 상존

□ 추진실적

❍ 송전선로 지중화사업 지원건의(군→산자부·한전)  : ‘19.  6. ∼ 11.

❍‘22년 국고지원(송전선로 지중화사업) 건의                : ‘21. 1.

❍ 한전 담당부서 현장방문(광주전남본부 전력관리처)         : ‘22. 7.

❍ 한전 ↔ 영암군 지중화사업 협의(군수 외 5명)             : ‘22. 8.

❍‘23년 송전선로 지중화사업 신청(영암군 → 한전)          : ‘22. 9.

- 전기사업법 제72조에 따라 요청자 전액 부담시 추진 가능 회신

□ 사업개요

❍ 사업기간 : `23. ∼ `30.(8개년)

❍ 사 업 비 : 48,000백만원(군 24,000, 한전 24,000)

❍ 사업주체 : 영암군, 한국전력공사

❍ 사업구간 : 154kV 대불-삼호 송전선로 대불변전소∼18호 구간

❍ 사업내용

- 신규 : 지중관로 및 케이블 약3.7㎞, 케이블헤드 철탑 1기

- 철거 : 가공송전선로 철탑18기, 전력선 5.5㎞

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023	한전 및 관련부처 협의	▪ 지중화사업 신청 및 관련부처 협의
		▪ 지중화사업 국고지원 건의
2024	사전 행정절차 이행	▪ 지중화사업 세부 추진계획 수립
2025	사전 행정절차 이행	▪ 투자심사 등 사전 행정절차 이행
2026~	지중화사업 시행	▪ 고압송전선로 지중화사업 시행

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	48,000					9,600	38,400
국 비
도 비
군 비	24,000					4,800	19,200
민 자	24,000					4,800	19,200

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
지중관로 매설	관련부처협의	관련부처협의	추진계획수립	행정절차이행	0.5km

□ 기대효과

❍ 대불산단주거단지 송전선로 지중화로 도시 미관 및 주거환경 개선

❍ 송전탑 철거로 도시계획 확장 장애 요인 해소