3-1		신재생에너지 단지 조성

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				720,000	-	-	-	720,000
완료시기	임기내 □ 임기후 ■
사업기간	2022 ~ 2030		추진상황	실시계획 수립용역 시행
사업주체	목포도시가스(주)외 2개사 영암군(일자리경제과)		공약담당	에너지산업팀장 손병희 ☎ 2610 에너지산업팀원 전종훈 ☎ 2612
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 영암국제자동차경기장 등 기업도시의 인프라를 활용한 신재생에너지단지를 조성하여 새로운 성장동력 확보 및 고용 창출

❍ 신재생에너지 집적화를 통한 신산업 기업 투자유치 활성화

□ 현    황

❍ 2013년 이후 국제 F1경기 중단 및 기업도시 개발사업 부진으로 삼포지구

활용도 제고를 위해 자동차 특화단지 조성 등 이용계획 강구

❍ 목포도시가스(주)가 KAVO의 민간지분을 인수하여 사업시행자로 추가

(21.12.)되어 개발사업의 새로운 동력 확보 및 추진체계 마련

❍ 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 수립용역

- 용역기간 : 2022. 8 ∼ 2023. 12(예정)

- 주요내용 : 상업시설·체육시설 → 신재생에너지 발전시설(607,839㎡)

주차장 → 수소발전단지(32,022㎡)

- 사업시행자 : KAVO(주), 전남개발공사, 목포도시가스(주)

□ 사업개요

❍ 사업기간 :‘22. ~ ‘30.

❍ 위    치 : 영암군 삼호읍 삼포리 일원(기업도시 삼포지구)

❍ 부지면적 : 639,861㎡(19만평) / 태양광(607천㎡), 수소(32천㎡)

❍ 사업규모 : 태양광 50MW, 수소 100MW

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2022	개발계획 변경(2차) 및 실시계획 수립 용역	▪ 신재생에너지단지 조성 세부 계획 수립
2023	개발계획 변경(2차) 및 실시계획 승인	▪ 문체부·관계기관 의견 협의 및 문체부 승인
2024	행정절차 이행	▪ 전기사업 인허가 등 행정절차 이행
2025~2026	신재생에너지(태양광) 발전시설 조성	▪ 태양광 발전시설 조성공사 착공
2026이후	수소발전단지 조성	▪ 수소발전단지 조성공사 착공 및 준공

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	720,000				40,000	40,000	640,000
국 비
도 비
군 비
민 자	720,000				40,000	40,000	640,000

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년이후
에너지단지 조성	수립용역시행	실시계획승인	행정절차이행	25MW	125MW

□ 기대효과

❍ 조선업 위주의 산업구조를 발전 잠재력이 큰 신산업으로 재편하고 고용

창출과 지역경제 활성화에 기여

❍ RE100, 2050탄소중립 시나리오 등 정부의 기후 위기에 따른 온실가스 감축 정책 부응 및 탄소중립 실현