4-4		청년문화거리 조성

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 □ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				852	-	-	852	-
완료시기	임기내 □ 임기후 □
사업기간	2023 ~ 2026		추진상황	계획수립 중
사업주체	영암군(인구청년정책과)		공약담당	청년정책지원팀장 진한겸 ☎ 2551 청년정책지원팀원 강혜련 ☎ 2552
중앙정부 도움 필요성		해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 군청 소재지인 영암읍은 인구 유출 및 지역상권 쇠퇴가 가속화 되고 있으며 특히, 청년층을 위한 문화시설이 전무

❍ 작은 영화관 및 청년 종합소통센터 이용객과 더블어 청년 인구 유입

□ 현    황

❍ 영암읍 성터 내 달맞이공원을 관광명소로 개발 진행중

- 경관도보교, 전망대, 오색동산, 야외공연장, 경관조명, 음악분수 등

❍ 청년 창업몰과 청년 종합소통센터 개관 시 연계 활용

❍ 5일 마켓, 특화상점가, 벽화거리가 영암읍 도시재생사업으로 확정

- 달맞이공원~청년종합소통센터~청년몰~특화상점가~5일마켓~벽화

거리를 청년을 주제로 연결하여 청년문화 테마거리 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 사업규모 : 청년문화거리 1개소 (영암읍 소재)

❍ 사업내용 : 청년문화 테마거리 조성, 청년문화행사 축제 개최 등

❍ 사 업 비 : 852백만원(군비)

- 용역비 22, 인프라 조성 200, 문화행사비 630

전문가 의견 수렴

✔ 광주전남연구원 황성웅박사

✔ 영암군만의 특화되고 세분화된 대상과 주제를 선정하기 위해 영암군의 자원(남생이,       한석봉 등)과 연계하여 영암만의 특색있는 거리 조성

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023	청년문화거리 조성	▪ 청년문화거리 콘텐츠 개발 용역
		▪ 청년문화 테마거리 조성계획 확정
		▪ 청년문화 테마거리 공간 조성
2024	청년문화거리 행사추진	▪ 문화행사 추진
2025	청년문화거리 행사추진
2026	청년문화거리 행사추진

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	852	-	222	210	210	210		-	22	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
군 비	852	-	222	210	210	210		-	22	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
거리조성		용역추진	거리조성
청년문화행사(횟수)	-	-	1회	2회	2회

□ 기대효과

❍ 청년층 문화·공연·전시행사에 참여할 수 있는 기회 제공으로 문화생활 만족도 향상 도모

❍ 청년문화 활성화 추진을 통한 청년인구 유입으로 영암읍 지역경제 활성화 및 지역 활력 제고