7-3		영산강 지류 수변 경관 조성

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 □ 계 속 □		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
				500			500
완료시기	임기내 □ 임기후 □
사업기간	2023 ~ 2026		추진상황	기본계획수립 중
사업주체	영암군(군민안전과)		공약담당	자연재난팀장 황석태 ☎ 2319 자연재난팀원 김한별 ☎ 2619
중앙정부 도움 필요성		해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 사업목적

❍ 영산강 지류 수변 친환경 산책로 조성 등으로 군민 힐링 공간 제공

❍ 영암을 찾는 관광객 및 지역 주민의 친수활동 공간과 볼거리 제공

□ 현    황

❍ 영암천은 영암읍에서 발원하여 영산강에 합류하는 지방2급 하천으로,상류부인 영암읍 구간에 산책로 조성 및 월출산 전망 데크 설치

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 영암 영암읍 송평리 1288 ~ 춘양리 672-14일원

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 사업규모 : L=6.2km(산책로 정비, 조경 및 전망데크 설치)

❍ 시행기관 : 영암군(전남도 「영암천 하천재해예방사업」과 연계)

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023	영암천 하천기본계획 (변경) 수립 용역	▪ 영암천 하천기본계획 정비(영산강유역환경청)
2023 ~2024	영암천 하천재해 예방사업	▪ 하천기본계획에 따른 하천재해예방사업 실시설계용역 완료
		▪ 영암천 하천재해예방사업(기존 수목 이식 L=1.8km)
2025 ~2026	영암천 하천재해 예방사업	▪ 하천제방(양안) 보축 L=2.3km 축제 L=3.4km
		▪ 영암천·망호천·회문천 합류지점 월출산 전망데크 설치
		▪ 제방 산책로 조성 및 수목 식재 등 경관 조성

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합 계	500	0	150	100	100	150	0	0	150	0	0	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	500	0	150	100	100	150	0	-	150	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표
	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
영암천 하천기본계획 변경 수립 용역	하천기본계획 수립용역 완료
영암천 하천재해 예방사업	하천재해예방실시설계용역완료	하천재해예방 사업 착공 기존 수목 이식 L=1.8km	하천제방(양안) 보축 L=2.3km 축제 L=3.4km	월출산 전망데크 설치 1개소

□ 기대효과

❍ 영암의 대표적인 하천인 영암천에 친수공간을 조성하여 주민의 삶의 질 향상에 기여

❍ 영암을 찾는 관광객에게 월출산 등의 관광자원과 연계한 볼거리 제공