안녕하십니까

우리군 행정에 관심을 가져 주신 점 매우 감사하게 생각합니다

귀하께서 『 군수와 대화』방에 올려 주신 민원에 대하여 다음과 같이 답변   드리고자 합니다

□ 감독관 업무규정

- 공사감독관은 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제16조, 공사계약일반조건 제16조 규정에 의거 계약된 공사의 수행과 품질확보 및 향상을 위해 성실히 현장관리 업무를  수행

□ 시공사 계약이행 사항

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제47조 표준계약서에 의한 계약 일반사항 및 특약사항 준수

□ 공사업무 전반 사항

민원사항	설계서 반영	시 공 분	비 고
기초방석 철근 처리 미비	-기초방석 (철근 D16) -기초바닥 (무근콘크리트) -두께 20cm	-기초방석 (철근 D13) -기초바닥 (철근콘크리트) -두께 25~29cm	기초바닥 전체를 철근 D13으로 설치하여 하중에 영향이 없을 것으로 판단됨
방부처리 미비	방부처리하도록 반영 (가압식)	미시공	설계변경시 처리비 삭감 또는 다른 공정으로 변경
현장대리인 미 상 주			현장대리인겸 사장(박영우)이 상주
1인 견적서만 으로 공사시행			추정가격 2천만원이하 공사시 1인견적서로 가능 (견적서 가격 3,200천원)
지붕보구조	오량구조 (처마 100cm)	미시공	구조상 문제점이 발견되어 현재 발주부서에서 검토 중 (오량⇒처마 50cm 삼량⇒처마 100cm)
공사기간 지연	2014.12.30 ~2015.02.27	2015.02.26 공사중지 중	지체상금 부과 계획

○ 현장에서 발견된 변경 시공된 기초방석 철근은 기초바닥 전체에 철근         (D13)콘크리트로 시공하여 하중에는 별 다른 문제가 없다고 보지만 현장       여건을 고려 보완 시공토록 조치하고

○ 지붕보구조는 현재 발주부서에서 검토 중으로 건축사무소 자문을 얻어 설치를 권유하고 있으며

○ 공사기간 지연에 대해서는 지체상금 부과를 계획하고 있습니다

● 이상과 같이 우리 군에서는 부실시공이 되지 않도록 더욱 노력하겠으니 다소       부족한 점이 있더라도 양지하여 주시기 바랍니다.